문서번호	급수운영과-16273
결재일자	2019.8.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
홍순재		최용진	08/08 유승효
협조

보 고 서

(부분기성 청구 보고)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 8.

북부수도사업소

(급 수 운 영 과)

보   고   서

명에 의하여 『2019년 도봉구청외 31개소 음수대급수시설개선공사』에 대한 부분기성 청구서가 접수되어 아래와 같이 보고합니다.

2019. 8. 8

보고자 : 지방공업(기계) 주사보  홍순재

1. 공사 현황

가. 계 약 명 : 2019년 도봉구청외 31개소 음수대 급수시설개선공사

나. 계약금액 : ***********

다. 계 약 일 : 2019년 6월 17일

다. 착공년월일 : 2019년 6월 20일

라. 준공 기한 : 2019년 11월 26일

마. 공사개요 : *********************************

사. 계 약 자 : **************

2. 보고 내용

◯ 부분 기성금 청구 요청

- 계약업체의 부분기성 청구서가 접수되어 검토후 처리코자 함.

- 부분기성 공사 기간 : 2019. 6. 20. ~ 2019. 7. 31

- 부분기성 공정률 : 도봉구청외 31개소 627m 공사 물량 중 27개소 447m를

작업하여 공정률 71% 완료됨

- 부분기성 내역서 및 관련 사진 첨부

3. 검토 결과

◯ 접수된 부분 기성내역서를 검토 결과 미정산된 보험료 공제후 지급코자하며

향후 설계변경시 보혐료 실정산 처리코자 함.

- 금회 부분 기성금액 : *********************************

- 선금정산액(자재비) : ************

- 6월 및 7월 노무비  : ************

- 금회 부분기성 지급액 : ***********

(부분기성 금액에서 선금정산액(자재비)와 노무비를 공제한 금액 지급)

4. 처리의견

상기와 같이 검토결과 기성(부분)금을 지급 처리하고자 함.

붙 임  1. 부분기성 청구서  1부.

2. 기성(부분)준공내역서 및 준공(부분)사진 각 1부  끝.