문서번호	시설보수과-7028
결재일자	2019.8.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
강연홍		代윤동원	08/13 박문희
협 조

준공기한 연기 검토보고

『공항입구 지하차도 보수공사』

2019. 8.

강서도로사업소

[시설보수과]

준공기한 연기 검토보고

2019년도 예산 사업으로 추진중인『공항입구지하차도 보수공사』에 대한 준공기한 연기 검토 보고 임

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명 : 공항입구 지하차도 보수공사

❍ 공사기간 : 2019. 4. 19 ~ 2019. 8. 16

❍ 계약금액 : 131,793,160원

❍ 도 급 자 : ㈜피플커뮤니케이션   대표 박상현

❍ 공 정 율 : 80%

Ⅱ		그간 추진사항

❍ 2019. 3. 11 : 공사발주

❍ 2019. 4. 19 : 공사착공

❍ 2019. 8. 13일 현재 : 신축이음부 보수공사 진행중

Ⅲ		보고내용

□ 준공기한 연기 보고 : 서울시설공단 검토보고

❍ 서울시설공단 공사감독1처-4783호(‘19.8.12)와 관련 보고사항

1) 준공기한 연기사유 :

벽체 신축이음부 재설치를 위한 단면손상부 보강방안 검토 및 시공에 따른 절대공기 부족

2) 준공기한 연기일수 검토

‣ 보강방안 검토 및 보강작업 소요 : 40일(용역사 검토 포함)

※ 소요일수 40일 중 중복기간 공제 및 잔여공종을 고려하여 21일 절대공기 소요되며, 절대공기 부족에 따라 준공기한 연기는 타당한 것으로 판단됨.

구 분	당 초	변 경	비 고
공사기간	2019.4.19. ~ 2019.8.16	2019.4.19. ~ 2019.9.6	21일 연장

Ⅳ		조치의견

□ 상기 보고 내용과 같이 신축이음부 보강작업을 위한 절대공기가 부족하므로 준공기한을 연기조치하고 잔여공종 추진에 만전을 기하고자 함.

❍ 공사기간 변경

- 당 초 : 2019. 4. 19 ~ 2019. 8. 16

- 변 경 : 2019. 4. 19 ~ 2019. 9. 6(21일 연장)

❍ 지체상금 부과 여부 : 미 부과

Ⅴ		향후계획

□ 2019. 8. 13 : 준공기한 연기 요청 (관리단속과)

□ 2019. 8. 13 : 변경계약

□ 2019. 9.  6 : 준공

따로붙임  1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 관련공문 1부.   끝.