투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	설계변경 시행(준공) - 오금지하차도 보수공사

1. 2019년도 예산사업으로 추진한 “오금지하차도 보수공사”에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산) 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 오금지하차도 보수공사

나. 공사개요

- 아스콘포장  A=61.28a, 신축이음장치 108m, 콘크리트보수공 873.3㎡

다. 공사기간 : 2019.2.26 ~ 2019.8.24

라. 계약금액 : 금308,907,700(금삼억팔백구십만칠천칠백원정)

마. 계 약 자 : 정민바우택㈜ 대표 차정훈

바. 변경사유 : 공종별 물량 증·감 및 제경비 실정산에 따른 계약금액 조정

사. 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 지하차도시설관리, 오금지하차도보수, 시설비 및 부대비, 시설비(특별회계)

아. 설계변경 내역                                                   (단위:원)

구 분		당 초	변 경	증・감
총 공 사 비		406,907,700	424,684,320	증) 17,776,620
도급비	공 급 가 액	280,825,182	329,545,455	증) 48,720,273
	부가 가치세	28,082,518	32,954,545	증) 4,872,027
	계	308,907,700	362,500,000	증) 53,592,300
관 급 비		85,837,000	51,633,320	감) 34,203,680
이 전 비		12,163,000	10,551,000	감) 1,612,000

붙임 : 1. 설계변경 방침 1부.

2. 설계변경서 갑지 및 내역서 1부.

3. 설계도면 1부.

4. 합의각서 1부.

5. 제비율 및 산업안전보건관리비 검증 1부.  끝.

	시설보수과장
주무관	윤동원		시설보수과장	08/20 박병연
협조자
시행	시설보수과-7215	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7976	/전송	02-2657-7950	/		/	대시민공개