투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	돈화문 민요박물관 건립공사 책임건설사업관리기술자 김태영
(경유)
제목	조경공사 실정보고 승인건 수량 정정보고 승인 통보(돈화문 민요박물관 건립공사)

1. 혜원돈화 제2019-296(2019.08.26.)호와 관련입니다.

2.『돈화문 민요박물관 건립공사』의 조경공사 실정보고 검토결과 승인통보 사항을     수량정정 사항에 대하여 아래와 같이 승인하오니 공사 품질관리 등 공사 감독     업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 실정보고 검토결과 승인사항

품 명	당 초	변 경	승인사항	비 고
배수판	269㎡ 500×500×45㎜	316㎡ 500×500×30㎜	2차 승인 수량 269㎡→ 1차 승인 수량 316㎡ 변경	적정

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	송석범		조경시설과장	신용우		방재시설부장	08/27 이임섭
협조자
시행	방재시설부-12693	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 플리미어플레이스빌딩 14층 도시기반시설본부 방재시설부	/
전화	02-3708-8795	/전송	02-3708-8756	/		/	대시민공개