투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	설계변경 시행(정산)『장충테니스장 개보수 전기공사』

1. 시설과-4103(2019.09.18)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행중인「장충테니스장 개보수 전기공사」의 설계변경을 다음과 같이 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 장충테니스장 개보수 전기공사

나. 공사기간 : 2019. 7. 15. ~ 2019. 9. 20.

다. 도 급 자 : **************

라. 설계변경 사유 : 현장 여건을 반영한 시공수량 변경, 신규공정 반영 및 보험료

미집행 경비 정산 등

마. 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분		설계변경금액			비고
		당 초	변 경	증·감
도급비	공급가액	200,443,563	213,000,000	증)12,556,437
	부가가치세	20,044,357	21,300,000	증)1,255,643
	계	220,487,920	234,300,000	증)13,812,080

바. 예산과목 : 관광체육국 전국체전기획과, 제100회 전국체전 및 제39회 전국장애인

체전개최, 전국체전 및 전국장애인체전 개최 준비, 제100회 전국체전

대비 시설 개보수, 시설비

붙임 1. 설계변경 시행보고 1부.

2. 설계내역서 및 검증확인서 각 1부.

3. 설계변경사유서 및 설계변경 합의각서 각 1부.  끝.

	시설과장
기전팀장	김석광		시설과장	09/18 김재균
협조자	재무팀장	박태경
시행	시설과-4107	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231 남산별관 (예장동)	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5971	/전송	02-3783-5969	/	ksk2050@seoul.go.kr	/	부분공개(5)