문서번호	시설관리과-9355
결재일자	2019.9.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
성기옥		유명은	09/19 신용철
협 조
	주무관			강정구

노후밸브 정비 점검결과 보고

2019. 9.

상수도사업본부

(시설관리과)

노후밸브 정비 점검결과 보고

2019년 노후밸브 정비 추진 관련하여 정비실적, 예산집행 실태 등을 점검하고 그 결과를 보고 드림.

※ 관련근거 : 시설관리과-8276(2019.8.19.)

Ⅰ		점검 개요

❍ 점검일자 : 2019. 8. 21.∼ 8. 27.(기간 중 4일)

❍ 점검대상 : 8개 사업소의 노후밸브 정비실적, 집행예산 등

※ 점검대상 기간 : ‘19. 1. 1. ∼ 7. 31.

❍ 점 검 자 : 시설안전부 시설관리과 성기옥 등 5명

- 중부, 서부, 동부, 북부 : 성기옥, 임춘길, 최세명

- 강서, 남부, 강남, 강동 : 강정구, 김동구

Ⅱ		점검내용

□ 추진실적

❍ 노후밸브 정비 실적

- 본부에 제출한 월보실적을 근거로 사업소 방문 점검, 비교분석

❍ 예산 집행 실적

- 예산회계관리시스템의 지출현황 기준, 집행 부진원인

*****************

*****************************

*********************************

*********************************

***************************************************

*********************************************************

□ 노후밸브 정비 우수사례 발굴

Ⅲ		점검 결과

□ 추진실적 (2019. 7월말 기준)

❍ 노후밸브 정비 현황

- (총평) 정비율은 49%(7월 목표, 40%)로 정상추진중이며 금년 목표는 달성 가능 전망 됨

- (실적) 월보 제출실적과 사업소 현장점검 결과 특별한 차이 없음

***********************************

*************************************************************

구분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
연간목표		3,200	560	260	510	135	500	410	555	270
실적 (개소)	월보	1,572	136	158	338	70	251	187	306	126
	점검결과 (정비율%)	1561 (49%)	136 (24%)	158 (61%)	338 (66%)	69 (51%)	245 (49%)	187 (46%)	302 (54%)	126 (47%)

❍ 예산집행 현황

- (총평) 집행율은 35.4%로 부진하며 집행률 향상을 위한 만회대책 필요

***************************************

*****************************************

******************************************

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	자재 센터	본부 (감리비)
예산액 (백만원)	27,480	4,266	2,019	2,522	1,183	3,752	3,130	3,866	1,826	3,716	1,200
집행액 (집행률)	9,722 (35.4%)	1,106 (26%)	672 (33%)	1,769 (70%)	475 (40%)	1,702 (45%)	508 (16%)	607 (15%)	544 (30%)	1,830 (49%)	509 (42%)

❍ 정비실적, 예산집행 부진원인

- (예산) 연간단가계약 사업으로서 건별 시공 후에 반기 또는 분기별 기성금을 집행하므로서 공사후 지출까지 장기간 소요

*********************************

**************************************

*****************************************

- (계약) 시설물연간단가 발주 시기가 매년 4월경으로 계약기간이 전년 5월~금년 4~5월까지 장기계속공사로 시행

⇒ 상반기 공사기간 동안 계약금액 초과 우려로 작업지시 소극적

※ 市 계약심사과의 방침(NO 824, ‘04.12.27)으로 시설물연간단가는 3~4월경 계약심사 후 발주

- (기타) 공사후 GIS속성 미수정으로 GIS에 노후밸브로 존치, 동일 시설물 작업지시를 위한 현장 재조사로 행정력 낭비

- (애로사항) 자치구, 경찰서 등 유관부서와의 굴착승인 협조 어려움

***************************

***************************************

*******************************************************************************************************************************************

**********************************************

*************************************************************************************************

□ 우수사례

❍ 정비실적, 예산집행 실적 우수 : 동부수도사업소

- 송배수관, 배급수관 정비사업이 본격 착수 전(4월까지) 시설물연간단가에 작업인력 집중투입 및 노후밸브 정비 현장작업팀 항시 유지

- 부서장이 중랑경찰서 등 유관부서를 직접 찾아가는 방문면담 실시

⇒ 맑은물 공급을 위한 사업의 필요성 등 적극행정 펼침

- 시설물연간단가사업을 자치구별 분리 발주로 작업물량 소화 극대화

❍ 작업지시서에 안전관리, 시공감독 사항 강조 지시 : 서부수도사업소

① 안전관련 지시사항

· 맨홀 공사 중 안내간판 및 안내요원 배치/ · 맨홀내 유해가스 유무 측정 후 출입

· 가스 등 관계기관 입회하에 공사시행

② 시공관련 지시사항

· 주요 간선도로 공기밸브실은 이탈방지기능 철개 사용

· 출퇴근 시간대 자재 반·출입 등 금지/ · 공사잔재는 즉시 반출 후 물청소 실시 등

※ 증빙자료 붙임 1 참고

Ⅳ		점검결과에 따른 추진방안

□ 공사 분야

❍ 단수가 수반되거나 대형밸브 정비시 작업계획서 수립 철저

❍ 단수, 수계전환은 충분한 기간동안 밸브를 서서히 조절하고 인근 퇴수밸브, 다용도밸브를 활용하여 수질 상태 실시간 모니터링

❍ 대규모 단수 등 필요시에는 무단수 공법을 활용하여 정비

❍ 정비완료 밸브는 속성 변경자료를 15일 이내 GIS 담당에게 제출

□ 실적 제고

❍ 과별, 월별 목표를 세분화하여 목표관리제 실시(‘20년부터)

❍ 시설물연간단가 사업 발주시기 변경 (4월 → 1월, ‘20년부터)

※ 당해년도 일위대가표 게시 시기에 맞추어 발주토록 사전 준비

❍ 기성금 지출을 최대한 신속 집행(정산 시기 단축)

□ 노후밸브 정비 제외물량을 중기계획 반영

❍ 잔여물량 : 22,341개소 (현재 24,592개소 - 제외 물량 2,251)

❍ 반영시기 : 2020년부터

□ 우수사례 횡단전개 및 인센티브 부여

<횡단전개>

❍ 노후밸브 정비 전담 작업팀(작업자) 관리

❍ 부서장이 자치구, 경찰서 등을 방문면담하여 사업 필요성 홍보 등 협조요청

❍ 작업지시서에 안전관리, 시공감독시 유의 사항 등 강조 지시

******

*********************************

*******************************

****************************

**************

************************************************

**************************************

*************************************

****************************

Ⅴ		행정사항

□ 시설물연간단가사업 발주시기 조정(1월)

- 일위대가표 조기 배포 협조(본부 안전총괄과)

□ 노후밸브 정비 대상물량 조정(중기계획에 반영)

□ 실적향상 대책 검토회의(중부, 남부, 강남)

- 일시 : ‘19. 9.26(목) 14:00

- 장소 : 시설안전부 회의실(4층)

- 안건(참석자) : 정비실적, 예산집행률 향상 대책(노후밸브 담당)

□ 우수사례 횡단전개, 평가반영 및 시장 표창 추천요청

붙임 : 시설물 설치 및 보수공사 작업지시서 1부. 끝.