투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(우성원 녹색자금 지원사업 나눔숲 조성공사)

1. 시설과-2308(2019.10.11)호의 관련입니다.

2. 우리사업소에서 추진 중인「우성원 녹색자금 지원사업 나눔숲 조성공사」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 우성원 녹색자금 지원사업 나눔숲 조성공사

나. 공사기간 : 2019. 8. 19. ~ 10. 17.

다. 도급금액 : ********

라. 도 급 자 : *************

마. 준공기한 연기

- 당 초 : 2019. 8. 19. ~ 10. 17.

- 변 경 : 2019. 8. 19. ~ 11. 01. (15일 연장)

바. 연기사유 : 대상지와 연접된 도로공사 지연으로 본 공사 절대공기 부족으로 공사기간 연장

사. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙  임 :  준공기한연기검토 보고 1부.  끝.

	시설과장
주무관	최종성		공원조성팀장	하종식		시설과장	10/11 진병규
협조자
시행	시설과-2316	(		)	접수		(		)
우	07062	서울 동작구 여의대방로20길 33 동부공원녹지사업소 시설과	/
전화	02-2181-1157	/전송	02-2181-1169	/	jongsung79@seoul.go.kr	/	대시민공개