투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	준공기한 연기 요청(목동교 정밀안전진단 외)

1. 2019년도 예산사업으로 추진중인 『목동교(구교)정밀안전진단 및 구로1교외 1개소 정밀점검용역』에 대하여 다음과 같이 준공기한 연기의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 『목동교(구교)정밀안전진단 및 구로1교외 1개소 정밀점검용역』

나. 계 약 자 : ㈜세안안전진단 외1   대표 박기열 외1

다. 계약금액 : 금208,190,000원

라. 준공기간 변경

- 당 초 : 2019. 3. 25 ~ 2019. 11. 19

- 변 경 : 2019. 3. 25 ~ 2019. 12. 27

마. 연기사유 : 용역수행 추가과업지시 및 시설물 계측에 따른 절대공기 부족

바. 지체상금 부과여부 : 미 부과

따로붙임  1. 준공기한 연기의뢰서 1부

2. 합의각서 1부.

3. 방침서 1부.  끝.

	시설보수과장
주무관	강연홍		시설보수과장	10/16 박병연
협조자
시행	시설보수과-9017	(		)	접수		(		)
우	07520		/	www.seoul.go.kr
전화	2657-7971	/전송	2657-7970	/		/	대시민공개