“기분 좋은 변화, 품격 있는 강남”

등록번호	지역경제과-47688		주무관	경제정책팀장		지역경제과장		뉴디자인국장
			김용민	이경모		이수진		전결 10/25 김희주
등록일자	2019.10.25.
결재일자	2019.10.25.
공개구분	대시민공개
			협조자
					재무과장 직무대리		지영애
					계약팀장		代김성하

		- 이용고객 편의증진 및 상권 홍보효과 진작을 위한 -
영동전통시장 상권 안내 표지판 제작 설치 변경계약

추진일정 : 2019. 11. 8. 설치예정

계약금액 : 100,930천원

변경사유

❍ 영동빌딩 건물주의 상권 안내 표지판 높이에 대한 반대민원 해소

❍ 수개월 동안 상권 안내 표지판 설치 협의

변경내용

❍ 상권 안내 표지판의 균형미와 영동전통시장의 홍보 시안성을 유지하고 1층 간판을 가리지 않도록 조형물 높이 조정

2019.   10.   .

	강 남 구
(		지역경제과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법 제26 · 29조 • 유통산업발전법 제15조 • 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제13장 6절 1호 가목
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 추진경위 : 영동전통시장 조형물 설치를 신속히 추진하기 위하여 계약을 변경하고자 함
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 근거 및 기준을 검토하고 적시함
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 대상 : 상권 이용 고객, 영동전통시장 상인회 및 주변 상인
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( √ ) ② 이해관계인 및 예상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( √ ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 해당사항 없음
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당사항 없음

		- 이용고객 편의증진 및 상권 홍보효과 진작을 위한 -
영동전통시장 상권 안내 표지판 제작·설치 변경계약

강남대로 520번지 앞 영동전통시장 안내표지판 설치와 관련 영동빌딩 건물주 설치반대(간판 가려 영업권 피해)민원이 발생하여, 이를 해소하기 위해 상권 안내 표지판의 높이를 조정하여 설치함에 따라 추가 공정비 발생으로 변경계약을 시행하고자 함

Ⅰ			현 황

업    체 : 에이치에스디아이(HSDI)

계약금액 : 금100,930,000원

현    황

Ⅱ			추 진 사 항

변경사유

❍ 영동빌딩 건물주의 상권 안내 표지판 높이에 대한 반대민원 해소

❍ 수개월 동안 상권 안내 표지판 설치 협의

변경내용 : 과업지시서 및 계약금액 수정

❍ 상권 안내 표지판의 균형미와 영동전통시장의 홍보 시안성을 유지하고 1층 간판을 가리지 않도록 조형물 높이 조정

Ⅲ			소 요 예 산

소요예산 : 9,468천원

❍ 상권 안내 표지판(조형물) 설치 장비 및 인력 2회 동원

❍ 상권 안내 표지판(조형물) 높이 조정 제작

예산과목 : 지역경제과, 지역경제 활성화, 특화거리육성 및 지역경제 경쟁력 강화, 지역특화산업 및 주요상권 활성화 지원, 시설비및부대비, 시설비

Ⅳ			행 정 사 항

계약변경 (재무과 협조)

강남대로 상권 안내 표지판 설치 (2019. 11. 8.)