문서번호	치수과-3737
결재일자	2017.10.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	치수과장	시설부장
최규석	신용철	10/20 최진석
협 조
	총무과장		박병현
	기획예산과장		김건태

2017년 국가하천 유지보수 시행계획

2017. 10

한강사업본부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

2017년 국가하천 유지보수 시행계획

서울지방국토관리청에서 국가하천 유지보수비(국비)를 배정함에 따라, 한강공원 제방 및 둔치 정비계획을 수립하여 시행코자 함.

관련근거

❍ 2017년 국가하천유지보수사업 집행계획(서울지방국토관리청, 하천계획과-2136)

국가하천 유지보수비 배정

❍ 목적 : 한강시설물 유지관리를 통해 쾌적한 주민편의 공간 제공

❍ 유지보수비 배정현황

(단위 : 천원)

계	예 초	일반구간 정비	시설부대비
517,000	241,000	274,000	2,000

- 일반구간 정비(노후계단) : 274,000천원

· 예산과목 : 치수 및 하천관리, 하천복원 및 하천관리, 국가하천유지보수,

시설비/부대비(401-01, -/03)

시행계획

❍ 공사목적 : 제방사면의 노후된 계단을 보수하여 쾌적한 주민편의시설제공

❍ 위    치 : 광나루공원, 이촌공원, 잠원공원 노후계단 9개소

- (광나루공원) 광진교 남단 인근 2개소,  천호대교 남단 인근 3개소

- (이촌공원)   한강대교 북단 인근 1개소, 이촌안내센터 인근 2개소

- (잠원공원)   동호대교 남단 1개소

❍ 사 업 비 : 274백만원

❍ 공사기간 : 2017. 10월 ~ 12월

❍ 공사내용

- 노후되고 침하 발생된 콘크리트 계단을 철거하고 화강석 돌계단 설치

→ 기존 계단은 블록 형식으로 풀들이 많이 생겨 걷거나 앉아 있기 어려움.

→ 노후로 인한 부분파손 등으로 안전사고 발생 우려.

· 화강석 통계단 설치 : 4m×3.5~18m, 9개소, A=452㎡

❍ 시행방법

◆ 시설물 정비 :「2017년 한강공원 접근시설 유지보수공사」에 포함하여 시행

⇒ 별도 분리 발주시 도급자 선정 및 착수에 40일 이상 소요되어 연말까지

완료가 어려우며 또한 노후로 인한 부분파손 등으로 안전사고 발생이 우려

되어 긴급 정비가 필요함.

◆ 건설폐기물 처리 : 발생되는 건설폐기물이 소량으로 원활한 공사 추진을 위하여   “한강공원 나들목 증설공사(개화) 건설폐기물처리용역”에 포함하여 시행

- 건설폐기물(콘크리트 130㎥) 처리 : 8,000천원

·운반비 및 처리비 : 306톤 × 26,143천원 = 8,000천원

◆ 위치도 및 현황사진

위치도	현황사진

조치계획

❍ 상기와 같이 접근시설 노후에 따른 안전사고 예방 및 절대공기 부족으로       「2017년 한강공원 접근시설 유지보수공사(연간단가)」 및“한강공원 나들목         증설공사(개화) 건설폐기물처리용역”에 포함하여 시행하고, 추후 설계변경후        정산처리 코자 함.