문서번호	정수과-8909
결재일자	2019.11.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
박준호		代정갑평	11/19 김중영
협조
	주무관		양은영

『자양취수장 조류차단막·오일휀스 철거,설치 및 이물질 제거공사』

설계변경 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 11.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

설계변경 보고

『자양취수장 조류차단막·오일휀스 철거,설치 및 이물질 제거공사』

우리 정수센터 자양취수장 조류차단막․오일휀스 철거,설치 및 이물질제거 공사의 설계변경 사항이 발생하여 아래와 같이 설계변경을 시행하여 공사준공에 만전을 기하고자 함

공사현황

- 공 사 명 : 자양취수장 조류차단막․오일휀스 철거 설치 및 이물질 제거공사

- 공사개요 : 조류차단막, 오일펜스 철거 및 설치 780m

취수구 스크린 주변 이물질제거 및 수초제거 20개소 720㎡

오일펜스 및 조류차단막 구매 60m

- 공사기간 : 2019. 06. 03. ~ 2019. 11. 29.

- 도 급 액 : ************************

- 도 급 자 : ***************

변경내용

- 제경비 납부 정산에 따른 감액

· 국민연금보험료(835,719원 → 0원) 미 납부로 감액

· 국민건강보험료(599,860원 → 0원) 미 납부로 감액

· 노인장기요양보헙료(51,048 → 0원) 미 납부로 감액

- 계약금액 변경내용

구 분	금 액		증, 감	비고
	당 초	변 경
도 급 비	**********	**********	************

검토근거

- 공사계약 일반조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액 조정)

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제39조 내지 제42조 및 건설기술관리법

제26조 5 제3항 및 같은법 시행규칙 제28조 2조의2에 의거 보험료정산

처리의견

- 상기 공종별 물량변동 등에 대한 설계변경건에 대하여 건설공사 설계변경

심의 및 준공 처리절차 운영계획에 의거 설계변경 심의위원회를 개최하고 결과에

따라 설계변경 및 준공처리코자 합니다.

붙임 :  1. 설계변경 내역서  1부.

2. 계약금액조정 검증확인서  1부.  끝.