투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	변경계약 의뢰(석촌지하차도외 4개소 정밀점검용역)

우리사업소에서 시행중인 『석촌지하차도외 4개소 정밀점검용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경 후 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 석촌지하차도외 4개소 정밀점검용역

나. 용역기간 : 2019. 4. 30. ～ 2019. 10. 26.

다. 용 역 비 : 112,776,000원

라. 도 급 자 : (주)아워브레인 대표 김정호

마. 예산과목

- 도로시설과, 도로시설물 운영(도시개발특별회계), 시설물 안전점검 및 진단, 시설비 및 부대비, 시설비(44,232,000원→61,438,000원)

[기 배정액(12,000,000원)+낙찰차액(5,206,000원)]

- 교량관리, 교량시설물 점검관리(도시개발특별회계), 교량시설물 안전점검 및 진단, 시설비 및 부대비, 시설비(68,544,000원)

바. 설계변경 내역

구 분		용 역 비(원)			비 고
		당 초	변 경	증 ․ 감
총 용 역 비		112,776,000	129,982,000	증)17,206,000
도급비	공 급 가 액	101,678,182	117,320,000	증)15,641,818
	부가가치세	10,167,818	11,732,000	증)1,564,182
	자문비	930,000	930,000	-

사. 설계변경 사유 : 정밀점검 대상시설물별 추가(탄천우안도로지하차도)

붙임 : 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 검토 보고서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 청렴계약 이행서약서 1부.

5. 합의 각서 1부.  끝.

	시설보수과장
주무관	이평주		시설보수과장	08/06 임영철
협조자	주무관	장인숙
시행	시설보수과-4184	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33 시설보수과 (대치동) 시설보수과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0377	/전송	02-2040-0308	/	lpj1121@seoul.go.kr	/	대시민공개