문서번호	시설과-8882
결재일자	2019.12.4.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관	시설과장	관리부장	서울대공원장
박병호	양희상	심상원	12/04 송천헌
협 조
	주무관		배진수

‘생명에 대한 감동과 보전의 중심 ’서울대공원 2030 비전 실행

「서울대공원 건축시설물 정밀점검 및 내진성능평가용역』 실정보고에 대한 설계변경 검토 보고

2019. 12.

서울대공원

(시 설 과)

「서울대공원 건축시설물 정밀점검 및 내진성능평가용역』

실정보고에 대한 설계변경 검토 보고

「서울대공원 건축시설물 정밀점검 및 내진성능평가 용역」감독업무 수행 중 용역사로부터  실정 보고가 있어 검토하고 설계변경을 시행하고자 함.

1		용역 개요

□ 사업개요

○ 용 역  명 : 서울대공원 건축시설물 정밀점검 및 내진성능평가 용역

○ 위     치 : 대창고 외 40개소

○ 용역개요

- 41개 건축시설물에 대한 정밀안전점검

- 41개 건축시설물에 대한 내진성능평가

○ 용역기간 : 2019. 06. 03. ~ 2019. 12. 29.

○ 소요예산 : **************

○ 용 역 사 : ************************

*******************

2		실정보고 검토 내용

대 상	실 정 보 고 내 용	검 토 의 견	비 고
실내사격장	목구조 시설물로서 기존시설물(건축물) 내진성능평가요령(국토행양부, 한국시설안전공단, 2013년)에서 평가방법을 제시하고 있지 않음	내진 성능평가 용역에 대한 용역범위에서 제외하고 정산처리하고자함
상점	목구조 시설물로서 기존시설물(건축물) 내진성능평가요령(국토행양부, 한국시설안전공단, 2013년)에서 평가방법을 제시하고 있지 않음	내진 성능평가 용역에 대한 용역범위에서 제외하고 정산처리하고자함
신비입체영화관	상부 돔 구조물은 상재하중이 없는 막구조물임 돔구조물의 형상(좌표)정보가 없어 구조해석 및 내진성능평가 불가함	내진 성능평가 용역에 대한 용역범위에서 제외하고 정산처리하고자함

□ 주요변경 사항

3		용역비 변경 현황

(단위:원)

구 분		당초금액	변경금액	증․감	비 고
****		***********	***********	************
* * *	****	***********	***********	************
	*****	**********	**********	************
	*	***********	***********	************

○ 실정 보고

- ************************

4		조 치 의 견

**************************

****************************************************************************************************************

붙임 : 실정보고서 1부.   끝.