문서번호	도로보수과-6069
결재일자	2019.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	동부도로사업소장
하승환		代유진석	12/05 代유재필
협 조

『도로굴착복구공사 및 노후포장도로정비공사 건설사업관리용역(1권역)』

정산설계변경(1차분) 검토보고

2019. 12. 05.

성동도로사업소

도로보수과

『도로굴착복구공사 및 노후포장도로정비공사 건설사업관리용역(1권역)』

정산설계변경(1차분) 검토보고

건설사업관리용역(1권역) 1차분에 대하여 도로보수과-5077호로 기 보고된 감리투입계획 변경 지시사항을 반영한 정산설계변경 검토보고임

□ 관련근거

❍ 건설사업관리(감독권한대행) 개선방안 : 도로관리과-18941(’18.12.21.)

- 계약방법변경 : 일반용역 → 장기계속용역

❍ 감리투입계획 변경 검토 보고 : 도로보수과-5077(’19.10.10.)

- 낙찰차액 사용한 감리 투입계획 변경에 대한 보고

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 도로굴착복구공사 및 노후포장도로정비공사 건설사업관리용역(1권역)

❍ 용 역 사 : 한국건설관리공사외 2사

❍ 계약금액 : 전체분 2,521백만원, 1차분 704,600천원

❍ 금년예산 : 733,000천원

❍ 용역기간 : 2019.04.08.~2021.01.21.

❍ 낙 찰 율 : 96.13%

□ 보고내용

❍ 감리투입계획 변경 검토 보고【도로보수과-5077(’19.10.10.)】에 의거 낙찰차액을 사용 건설사업관리기술자 투입계획 변경 지시에 대한 계약내용 변경임

□ 예산현황 및 설계변경내역

❍ 예산현황                                          (단위 : 원)

전체분 계약금액	1차년도 예산	1차년도 계약금액	낙찰차액	비고
2,521,000,000	733,000,000	704,600,000	28,400,000	840,333천원/년 확보 필요

❍ 설계변경내역                                       (단위 : 원)

구 분		금 액(원)			비 고
		당 초	변 경	증·감
총 용 역 비		704,600,000	708,550,000	증) 3,950,000
도급비	공 급 가 액	635,080,655	638,671,564	증) 3,590,909
	손해배상보험료	5,464,800	5,464,800	0
	부 가 가 치 세	64,054,545	64,413,636	증) 359,091
	계	704,600,000	708,550,000	증) 3,950,000

※ 계약금액 대비 용역비 증가비율 : 약 0.56%

□ 조치계획

❍ 붙임 정산설계변경내역서와 같이 설계변경을 시행하여 금년도(1차년도) 건설사업관리용역 마무리에 최선을 다하고자 함.

붙 임 1) 감리투입계획 변경검토보고서.

2) 정산설계변경내역서(1차분-1회). 끝.