문서번호	토목부-22597
결재일자	2019.12.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
권해엽		장종환	12/06 김용제
협조	주무관		황윤기
	주무관		노순재

설계 변경(7차 1회) 검토 보고

- 동부간선도로 확장공사(3공구) 건설폐기물 처리용역 -

2019. 12.

도시기반시설본부

(토목부)

설계 변경(7차 1회) 검토 보고

- 동부간선도로 확장공사(3공구) 건설폐기물 처리용역 -

임시가설도로 포장 철거, 수락고가 기존구조물 철거 등 일부공정에서 추가 폐기물이 발생하여 설계에 반영하고자 보고드림.

※ 관련근거 : 동삼감 제2019-3012호(19.12.02.)

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 동부간선도로 확장공사(3공구) 건설폐기물 처리용역

○ 용역금액 : 930,979,300원(7차 100,000,000원)

○ 용역규모 : 폐콘크리트 50,000톤, 폐아스콘 20,171톤,

혼합폐기물 700톤

○ 용역기간

- 전  체 : 2008.05.21. ~ 2020.12.31.

- 7   차 : 2019.02.26. ~ 2019.12.31.

○ 용 역 사 : 인선이엔티(주)

□ 설계변경 및 주요내용

○ 설계변경 현황

구 분	당 초	변 경	비 고
총 차	′08.05.21.~ ′20.12.31.	′08.05.21.~ ′20.12.31.	변경 없음
	금930,979,300원	금930,979,300원	변경 없음
7 차	′19.02.26.~ ′19.12.31.	′19.02.26.~ ′20.05.31.	증 5개월
	금100,000,000원	금100,000,000원	용역내용 변경

○ 설계변경 내용

- 시설공사 차수기간 연장 반영(당초 19.12.31. → 20.05.31.)

- 3-2구간 개통을 위한 절삭·재포장 시행(폐아스콘 등 발생)

- 시설물 인수기관(서울시설공단) 요청사항 반영

○ 물량 변경 현황(7차 1회)

구 분	당 초	변 경	증.감	비 고
폐콘크리트	2,941ton	1,650ton	-1,291ton
폐아스콘	3,941ton	5,215ton	1,274ton
혼합폐기물	287.5ton	287.5ton	-

□ 감리단 검토의견

○ 시설 공사 공정 계획 변경 및 현장여건 변동으로 계약기간 내에 폐기물 처리 용역이 마무리 되도록 공정계획(차수별 폐기물처리량 및 용역기간)을 적정하게 조정 수립한 것으로 판단됨.

○ 지계법 제22조, 같은법 시행령 제74조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 및 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제97조에 따라 변경설계서를 검토한 결과 설계변경 등으로 인한 계약금액 조정은 적정한 것으로 판단됨.

□ 조치의견

○ 감리단 검토 의견이 타당하여 설계변경을 통하여 폐기물 처리물량에 대하여 변경 및 정산하고자 함.

붙임  감리단 검토 의견서 등 관련 서류 각 1부.  끝.