문서번호	급수운영과-23846
결재일자	2019.12.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
송현우	서규석	12/19 이성환
협 조

설계변경 검토보고

(봉천동 921번지 외 3개소 배급수관 정비공사)

2019. 12. 19. (목)

남부수도사업소

(급수운영과)

설계변경 검토보고

(봉천동 921번지 외 3개소 배급수관 정비공사)

「봉천동 921번지 외 3개소 배급수관 정비공사」 업무수행 중 현장 시공여건 변화에 따른 신규공종 및 물량 증 ․ 감이 발생됨에 따라 설계변경을 시행하여 공사업무에 만전을 기하고자 함.

※추진근거: 공사감독2처-21065(19. 12. 28.) “설계변경(정산) 보고서 제출(봉천동921번지)”

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 봉천동 921번지 외 3개소 배급수관 정비공사

○ 계약기간 : 2019. 8. 26. ~ 2019. 12. 28.

○ 계 약 자 : ************

○ 계약금액 : *************

○ 공사개요 : D=20~300㎜, L=1,111m

□ 설계변경 근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

- 설계변경으로 인한 계약금액 조정

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(예규 제39호)

- 제13장 공사계약 일반조건 “6(공사설계의변경)-7(계약금액의조정)”의 규정

□ 설계변경 사유

○ 공사 시행중 현장 시공여건 변화 및 상수도 공사의 특수성으로

신규공종, 자재 및 물량변동(증 ․ 감) 발생

- 신규공종 : 「A-파쇄물운반(0.18상차별도)-15DT현장→집하장(10km)」외 35개 공종

- 신규사급자재 : 「새들,주철관용(슬립인접합)-100/25」 외 14개 자재

- 물량증가 : 「아스팔트 포장절단기(야간,6차선지세)」 외 109여개 공종

- 물량감소 : 「인력터파기 견질토사 (야간,1-2m) 외 89여개 공종

○ 주요 설계변경 사유(공단 실정보고 사항)

- “추가작업팀 투입”                  「급수운영과-20349(19.10.30.)」

- “2구간 시점부 연결지점 변경”               「급수운영과-22552(19.12.2.)」

- “2구간 가정인입관(봉천동 927-5) 연결선형 변경” 「급수운영과-22552(19.12.2.)」

- “1구간 운반 장비조합 변경”                 「급수운영과-22552(19.12.2.)」

- “중간집하장 위치선정에 따른 거리변경”      「급수운영과-23262(19.12.11.)」

- “잔토처리 전 중간집하장 채가름 실시”       「급수운영과-23262(19.12.11.)」

□ 설계변경 현황

○ 계약금액 변경

구 분	금 액		증 ․ 감	비 고
	당 초	변 경
공급가액	***********	***********	***********
부가가치세	**********	**********	**********
도 급 비	***********	***********	***********	감 3 %

○ 공사개요 변경

구 분	당 초	변 경	비고
공사개요	******************* *********	******************* *********	********* *********

○ 주요 신규공종, 자재 및 물량 증 ․ 감 내역

공 종	규 격	수 량			변동금액(원)
		단위	당초	변경
아스팔트 포장절단	200mm이하, 야간	m	2,210	2,643	**********
아스팔트 포장깨기	굴삭기 0.6㎥, 야간	㎥	207	227	**********
경고테이프설치	20cm(야간)	m	1,111	1,106	**********

공 종(자재)	규 격	수 량			변동금액(원)
		단위	당초	변경
플랜지접합부속	D=100mm	개	신규	16	***********
새들	100mm×25mm	개	신규	4	***********
청동 게이트 밸브	D=25mm	개	신규	1	**********
인력터파기	견질토사(1-2m) 야간	㎥	53	91	*************
되메우기(기계100%) 양호	굴삭기 0.18㎥(야간6차선)	㎥	295	300	***********
KP 이탈방지압륜 접합	100mm, 야간	개소	155	110	***********
살수 및 청소	야간	m	991	1,106	***********
주철이형관 부설공	D=100mm	개소	132	104	**********
플랜지접합공	D=100mm, 야간	개소	22	16	***********
절단면 녹막이 페인트칠	100mm 야간(3회)	개소	신규	32	***********

□ 조치계획

○ 상기와 같은 설계변경 내역에 대하여 설계변경 심의위원회를 개최하여

심의 결과에 따라 설계변경을 시행코자 합니다.

붙임  1. 설계변경 검토보고(공단) 및 갑지(공단) 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 계약조정검증 확인증 1부.

4. 설계변경 합의서 1부.

5. 설계변경 사전심의 요청서 1부.  끝.