문서번호	급수운영과-25673
결재일자	2019.12.20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
서영인	박장진	12/20 채재일
협 조

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

(서대문역~강북삼성병원앞 송배수관 정비공사)

2019. 12.

중부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

우리사업소에서 시행중인 『서대문역~강북삼성병원앞 송배수관 정비공사』와 관련하여 시공물량 증감 및 신규공종 발생 등으로 설계변경 심의위원회 개최결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 심의대상

가. 공 사 명 : 서대문역~강북삼성병원앞 송배수관 정비공사

나. 공사기간 : 2019. 04. 29 ~ 2019. 12. 20

다. 공사개요

- (당초)D=300~600mm, L=360m

- (변경)D=300~600mm, L=316m

라. 시 공 사 : 세인트건설주식회사 대표 송선옥, 노아건설(주) 대표 이창수

마. 설계변경 금액 : *********************

▶ *************************************

2. 심의일시 및 장소

가. 일시 : 2019. 12. 12(수) 오전10:00

나. 장소 : 3층 급수운영과 사무실

3. 설계변경 현황

가. 공사비 변경 개요                                       (단위 : 원)

구분	당초	변경	증·감	비고
총 부기금액	***********	***********	************

나. 설계변경 사유

- 공사 시행중 현장여건 변동에 따른 물량증감 및 신규비목 발생

4. 심의내용

가. 설계변경의 타당성

나. 신규공종 단가산출 및 물량증감 적용 적정여부

- 신규공종 : 퇴수관하수도연결공(600*200mm,야간+작업시간제한할증)외 14개 공종

- 단가적용 : 계약단가 및 설계변경 산출단가에 낙찰율(******)을 적용한 변경단가를 적용

- 물량증감 : 잔토상차(집하장,굴삭기0.7㎥) 외 132개 공종

다. 사급자재비 산출 적정여부

- 신규자재 : 사각철개고정틀(D=1000mm)외 6종

라. 제경비 적정 산정 및 적용 적정성

마. 부대공 적정 산정 검토

바. 계약금액 조정(설계변경) 등

5. 심의결과

가. 계약변경 타당

나. 주요공종 변경사항 타당

다. 세부공종 조정내역 타당

라. 제경비 적용 타당 등

6. 조치의견

가. 심사결과에 의거 설계변경을 시행하고, 행정지원과에 변경 계약의뢰코자 함

첨부 : 1. 설계변경 사전심사 요청서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 심의의결서 1부.  끝.