“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	설계변경 및 변경계약 요청[2019년 마포대교(상류교) 보수공사]

우리부서에서 시행중인 “2019년 마포대교(상류교) 보수공사”와 관련하여 다음과 같이 설계변경 및 변경계약을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2019년 마포대교(상류교)보수공사

나. 공사기간 : 2019. 4. 25. ~ 2019. 12. 25.

다. 계약금액 : 700,847,240원

라. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증. 감
도 급 액	700,847,240	732,985,000	32,137,760
관 급 자 재 대	141,027,000	159,663,735	18,636,735
이 전 비	50,683,000	43,860,000	6,823,000
총 공 사 비	892,557,240	936,508,735	43,951,495

마. 변경사유

- 신규 공종 및 시공 물량 증․감 반영

바. 예산과목 : 교량관리, 일반교량관리, 마포대교 보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임 : 1. 설계변경 및 추진계획에 대한 보고 1부.

2. 설계변경 내역서 및 검증 확인서 각 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	교량안전과장
주무관	김윤희		기술점검팀장	위성환		계약1팀장	조현		교량안전과장	12/19 김종호
협조자
시행	교량안전과-21293	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-1979	/전송		/	nskyh65@seoul.go.kr	/	부분공개(5)