＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	남부수도사업소
수신자	행정지원과장
(경유)
제 목	설계변경에 따른 계약의뢰 (2019년 동작,영등포구 관내 장기계속공사 건설폐기물 처리용역)-1차

우리사업소에서 시행한 『2019년 동작, 영등포구 관내 장기계속공사 건설폐기물 처리용역』에 대하여

아래와 같이 설계변경을 시행하고 계약의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 2019  동작,영등포구 관내 장기계속공사 건설폐기물 처리용역

나. 도 급 자 : *************

다. 용역기간 : 2019. 7. 22. ~ 2020. 7. 31.

라. 설계변경 사유 : 현장 상태에 따른 물량 증․감으로 설계변경

마. 설계변경 금액내역

구 분	당초 계약금액	변경 계약금액	증 ․ 감	비 고
총 부기금액	106,750,000원	106,750,000원	-
1차수	70,543,000원	73,594,000원	증3,051,000
2차수	36,207,000원	33,156,000원	감3,051,000

바. 예산과목

- 상수도사업비용,영업비용,급수공사.신설공사비

- 소방용수시설설치개보수,소방용수시설등의설치 및 관리, 소방용수시설설치 및 보수(소화전)

- 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비 및 부대비,시설비(노후밸브정비)

붙임 : 1. 내부품의서 1부.

2. 설계변경 심의 개최결과 및 시행보고서 1부.

3. 설계변경 심사요청서 1부.

4. 심의의결서 1부.

5. 변경내역서 1부.

6. 변경계약 합의서 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	이순필		시설운영팀장	권승계		시설관리과장	12/19 고신석
협조자
시행	시설관리과-26490	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화	3146-4593	/전송		/		/	부분공개(7)