문서번호	도시철도계획부-10226
결재일자	2018.12.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	영동대로복합개발과장		도시철도계획부장		도시철도국장		도시기반시설본부장
이상원	김동철		代최병훈		박상돈		12/21 한제현
협 조
	도시철도건축부장					박은섭
	도시철도설비부장					구자훈
	주무관					이상훈
	주무관					윤득근

「영동대로 지하공간 복합개발」관련

실시설계 건설사업관리용역 시행계획

2018.12

도시철도계획부

(영동대로복합개발과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

「영동대로 지하공간 복합개발」관련

실시설계 건설사업관리용역 시행계획

영동대로 지하공간 복합개발 사업과 관련하여 실시설계 건설사업관리용역 발주계획을 수립하여 보고드림

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거

○ 건설기술진흥법 제39조, 같은법 시행령 제57조

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제7조, 같은법 시행령 제2조

○ 건설사업관리용역 발주 및 낙찰자 선정방법 검토(도시철도계획부-9624)

	사업개요
○ 사업위치 : 삼성역 사거리(삼성역 2호선) ~ 코엑스 사거리(봉은사역 9호선) ○ 사업규모 : 복합환승센터 630m(지하 6층, 연면적 16만㎡), 철도터널 370m - 철도시설 : GTX-A·C, KTX 의정부 연장, 삼성~동탄 광역급행철도, 위례~신사선 ○ 사업기간 : 2015년~2023년(`18년 기본설계/`19년 착공/`23년 완료) ○ 총사업비 : 13,067억원(기본계획 기준)

□ 사업위치도

□ 추진현황

○ `16.10.31	: 영동대로 통합개발 MOU 체결(국토부-서울시, 도시교통본부)

○ `17. 8.10 : 영동대로 복합개발 기본계획 방침(시장)

○ `17.10.20	: 국제설계공모 완료(당선 : 정림건축·DPA 컨소시엄)

○ `18. 1.17	: 용역 시행계획 방침(행정 2부시장)

○ `18. 2.28 : 기본설계 진행(도시기반시설본부)

○ `19. 2.29 : 기본설계 준공

○ `19. 5     : 공사 착공(설계·시공 병행방식 Fast Track)

Ⅱ		관계법령 검토

□ 관계법령 : 건설기술진흥법 제39조 및 같은법 시행령 제57조

□ 대상여부 검토(건설기술진흥법 시행령 제57조 제2항 및 제4항)

제57조 법 제39조 제3항에서 "대통령령으로 정하는 설계용역"이란 다음 각 호의 설계용역을 말한다.

2.「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제7조 제1호 및 제2호에 따른 1종 시설물 및 2종 시설물이 포함되는 건설공사의 기본설계 및 실시설계용역

4. 총공사비가 300억원 이상인 건설공사의 기본설계 및 실시설계용역

□ 검토의견

○ 본 사업은 고속철도 및 도시철도 터널이 포함된 제1종 시설물로서 총공사비가 300억원 이상인 건설공사로 실시설계 건설사업관리 대상에 해당

Ⅲ		용역 시행계획

□ 용역개요

○ 용 역 명 :『영동대로 지하공간 복합개발』관련 강남권 광역복합환승센터   실시설계 건설사업관리용역

○ 용역기간 : 착수일로부터 21개월(장기계속계약)

○ 용역규모 : 삼성역 사거리(삼성역 2호선) ~ 코엑스 사거리(봉은사역 9호선)

○ 용역대상 : 실시설계 건설사업관리용역(토목, 건축, 기계, 전기, 소방, 통신)

○ 소요예산 : ********************************************

- 예산과목 ※ 2019년 예산안에 따라 예산과목이 조정될 수 있음

① 도시기반시설본부, 신교통수단 도입, 경전철건설사업, 영동대로 지하공간 복합개발(도시철도)

② 도시기반시설본부, 도시철도 및 광역철도 건설, 광역철도 건설사업, 영동대로 지하공간 복합개발(교통개선대책분담금)

※ 현재 기본설계용역 중으로 개략공사비로 용역을 시행하고, 추후 기본설계용역 준공 후 기본설계 기준으로 공사비 확정 시 용역사와 협의하여 정산조치하겠음

▢ 주요 과업내용

○ 과업 착수준비

○ 실시설계 건설사업관리 업무수행계획서 및 절차서 작성

○ 기본설계 용역성과 검토

○ 실시설계 조정 및 연계성 검토

○ 실시설계의 예산검증 및 조정업무

○ 실시설계 용역성과 검토

○ 실시설계 용역 기성 및 준공검사 관리

○ 각종 인허가 및 관계기관 협의 지원

□ 과업수행자 선정계획

○ 입찰방법 : 일반경쟁[사업수행능력(PQ)평가 후 가격입찰]

○ 입찰참가자격

- 토목분야 :「건설기술진흥법」제26조 및 같은법 시행령 제44조에 의하여 전문분야가 종합 및 설계‧사업관리분야의 일반 또는 건설사업관리로 세부분야를 등록된 업체

- 건축분야 :「건축사법」제23조에 의한 건축사사무소를 개설하고 국토교통부 장관에게 신고를 필한 업체

- 기계분야 :「엔지니어링 산업진흥법」제21조에 의하여 설비부문의 설비전문분야를 엔지니어링사업자로 신고한 업체 또는「기술사법」제6조에 의하여 설비부문의 설비전문분야 기술사사무소로 등록한 업체

- 전기분야 :「전력기술관리법」제14조에 의하여 종합설계업 또는 전문설계업 1종으로 등록된 업체, 또는「기술사법」제6조에 의하여 건설부문의 건축전기설비 전문분야 및 전기부문 기술사사무소로 등록한 업체

- 통신분야 :「엔지니어링 산업진흥법」제21조에 의하여 정보통신부문의 정보통신 전문분야를 엔지니어링사업자로 신고한 업체 또는「기술사법」제6조에 의하여 정보통신부문의 정보통신 전문분야 기술사사무로 등록한 업체

- 소방분야 :「소방시설 공사업법」제4조에 따른 전문소방시설 설계업을 등록을 필한 업체

○ 공동계약 방법

- 토목분야는 공동이행 방식으로 하고, 토목분야 이외는 분담이행 방식으로 함.

- 공동수급체 구성원 수는 대표사를 포함하여 10개사 이내로 하고, 토목분야(공동이행방식)의 구성원은 5인 이하로 하며 구성원별 최소 지분율은 5%이상이어야 한다. 다만, 분담이행 방식의 공동수급체 지분율은 과업내용별 용역참여비율(분담비율)과 동일하여야 함.

- 과업내용별 용역참여비율(분담비율)****************************

계(%)	토목분야	건축분야	기계분야	전기분야	통신분야	소방분야
*****	****	****	****	***	***	***

- 공동수급체 대표자는 토목분야의 출자비율이 큰 업체로 선임.

○ 입찰참가 적격자 선정 및 낙찰 결정

- 입찰참가 적격자 선정

· “입찰참가 적격자”는 실시설계단계 건설사업관리 용역에 참가하고자 하는 자 중 수행실적평가 결과 90점 이상을 얻은 자를 말한다. 다만, 수행실적평가서 제출업체가 15인 미만인 경우에는 수행실적 평가점수가 60점 이상인 모든 업체에게 입찰참가자격을 부여

- 낙찰자 결정

· 입찰참가적격자 중 예정가격 이하로서 낙찰하한선(77.995%) 이상 최저가 입찰자부터 순서대로 심사한 결과 종합평점이 90점 이상인 자를 낙찰자로 결정.

※ 종합평점 산정 : 사업수행능력평가(64점)+책임기술자 경력평가(1점)+지역업체참여도(3점)+경영상태(2점)+입찰가격(30점)+기술인력보유상황(△10)+계약질서준수(△1.0)

Ⅳ		조치계획

□ 예산계획 : 장기계속계약으로 추진*************

*******************************

******************

□ 향후계획

○ '18.12. : 기술용역타당성 심사 및 일상감사 요청

○ '19. 1. : 사업수행능력평가 세부기준 수립 및 계약 의뢰

○ '19. 2. : 용역 계약 및 착수

붙임 1. 과업내용서 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 건설사업관리용역 발주 및 낙찰자 선정방법 검토 1부.  끝.