문서번호	시설보수과-1014
결재일자	2020.2.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
오광준		오재섭	02/07 고영준
협조

「장월교 개축공사 실시설계 용역」 발주 계획

2020. 02.

북부도로사업소

(시설보수과)

「장월교 개축공사 실시설계 용역」 발주 계획

정밀안전진단 결과에 따른 교량 개축공사 시행을 위한 실시설계   용역 발주 계획 임.

I		추진개요

□ 관련근거

○ 장월교 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역 완료 보고

(시설보수과-5669, 2019.7.11.)

○ 기술용역타당성심사 결과 통보

(기술심사담당관-21720, 2019.11.28.)

○ 예산 재배정 처리 알림

(교량안전과-1340, 2020.1.30.)

□ 시설물 개요

시 설 명	위 치	종별	연장(m)	폭(m)	구조형식	준공 년도	설계 하중
장월교	성북구 장위동270 ~ 노원구 월계동472	3종	45.0	20.0	PSCI, RCS 합성교	1991	DB-18

II		실시설계 용역 발주

□ 발주시기 : 2020. 2.(용역기간 : 착수일로부터 180일)

□ 소요 예산 : 199,210천원

□ 입찰 방법 : 제한경쟁(지역제한)

□ 입찰 참가자격

○ 엔지니어링산업진흥법 제21조 규정에 의거 공고일 현재 건설부분(도로·공항, 교통, 구조, 수자원개발, 토질·지질)에 엔지니어링사업 신고를 필한 업체 또는 기술사법 제6조에 의거 건설부분 중 전문분야(도로·공항, 교통, 구조, 수자원개발, 토질·지질)의 기술사 사무소를 개설 등록한 업체로서 주된 영업소의 소재지가 서울시에 있는 업체

※ 입찰참가자는 입찰참가등록 마감일 현재 위 자격을 보유하여야 하며, 입찰서 제출 마감일까지 해당 입찰참가자격을 계속 유지하여야 함.

○ 기술의 상호보완을 위해서 2개업체 내에서 공동 이행방식에 의한 공동도급 가능

III		향후 계획 및 행정사항

○ ‘20.  3.       : 용역착수

○ ‘20.  3. ~ 8. : 용역 시행 및 준공

- 착수보고, 중간 자문회의, 최종 자문회의

- 투자심사(40억원 이상의 신규 투자사업) 검토

- 서울시 공공디자인진흥위원회 심의

- 설계심의(50억원 이상 소규모 교량 등) 검토

- 특정기술 선정심의

- 계약심사

○ ‘20.  9.     : 공사 발주

붙임  1. 과업내용서 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 기술용역타당성 심사 결과 1부.

4. 사전규격(용역) 공개 결과 1부.

5. 예산배정서 1부.  끝.