문서번호	급수운영과-2350
결재일자	2020.2.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장	강남수도사업소장
박홍	代김진성	최춘근	02/12 박창석
협 조
	시설관리과장		정재현
	주무관		최지영

’20년 상수도공사 발주 및 ’19년 사고이월공사 추진계획

2020.  2.

강남수도사업소

’20년 상수도공사 발주 및 ’19년 사고이월공사 추진계획

우리사업소 시행예정인 “2020년 중블록별 무단수 급수체계 구축”, “송배수관, 배급수관 정비사업”, “사고이월공사 및 장기계속단가계약공사”에 대하여 세부  시행계획을 수립하여 공사시행에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ	’20년 발주 및 사고이월 대상 사업 현황

□  발주 및 사고이월 대상

구분	계	무단수 급수체계	송배수관	배급수관	사고이월	급수 공사	시설물공사	누수 복구	포장 복구	폐기물처리
건수	20	1	2	2	4	3	2	1	1	4

□ 단위사업 : 9건(무단수 급수체계, 송배수관, 배급수관, 사고이월)

□ 단가계약 : 11건(급수공사, 시설물정비, 누수복구, 포장복구, 폐기물처리)

Ⅱ	단위사업 추진계획

□  중블록별 무단수 급수체계 구축사업

□ 정비대상 : ******

□ 추진방법 : 단위사업으로 발주 시행

□ 추진계획

공 사 명	공사개요	사업비 (백만원)	공사기간	발주 예정	담당자	비고
서초1중블록 무단수 급수체계 구축공사	******* ******	***	*************	*******	***	** ***

※ 무단수 급수체계 구축사업 : 누수, 수질사고 등 돌발 사고 대비 블록시스템 구축, 정수장간 공급체계 구축 및 주요관로 이중화를 통하여 단수없는 안정적인 급수 공급체계를 구축하는 사업

□  장기사용(내용연수경과) 송․배수관 정비사업

□ 정비대상 : *****

□ 추진방법 : 단위사업으로 발주 시행

□ 추진계획

연번	공 사 명	공사개요	사업비 (백만원)	공사기간	발주 예정	담당자	비고
계		*********** ********	*****
1	테헤란로 장기사용 송배수관 정비공사	******* ********	*****	************	******	***	** ***
2	태봉로 장기사용 송배수관 정비공사	******* ******	***	************	******	***	** ***

※ 장기사용 송․배수관 정비사업 : 관 내부의 도장재 탈락 등으로 수질사고 우려가 높은 400mm 이상 상수도관의 선제적 정비를 통한 깨끗하고 안전한  수돗물을 공급하는 사업

□  장기사용(내용연수경과) 배․급수관 정비사업

□ 정비대상 : *****

□ 추진방법 : 단위사업으로 발주 시행

□ 추진계획

연번	공 사 명	공사개요	사업비 (백만원)	공사기간	발주 예정	담당자	비고
계		*********** ********	*****
1	대치동 1000번지외 9개소 장기사용 배급수관 정비공사	*********** ********	*****	************	******	***	** ***
2	서초동 1365번지외 7개소 장기사용 배급수관 정비공사	*********** ********	*****	************	******	***	******

※ 장기사용 배급수관 정비사업 : 관 내부의 도장재 탈락 등으로 수질사고 우려가 높은 350mm 이하 배급수관을 정비하여 최적의 관망환경을 조성하고 깨끗하고 안전한  수돗물을 공급하는 사업

□  단위사업 세부 추진계획

□ 공사시행 순서

계획 심사	⇒	현장 조사	⇒	자체 설계	⇒	설계 심사	⇒	공사 발주	⇒	착공	⇒	설계 변경	⇒	준공

□ 분야별 세부시행 계획

구 분	세부 일정 내용	비 고
계획심사 (도면심사)	’20.1.9. : 배급수관 도면심사(본부 누수방지과) ’20.2.7. : 무단수 급수체계, 송배수관 도면심사(본부 배수과)
설 계	’20.1. : 공사별 현장조사 ’20.1.~2. : 상수도공사 일위대가 작성(본부 재무회계과) ’20.2.~3. : 교통소통대책 심의(본청 교통운영과) ’20.2. : 도로굴착 사업계획 심의(서초구청, 강남구청) ’20.2. : 설계서 작성완료
설계심사	- ’20.2. : 설계심사 요청(본청 계약심사과)
공사발주	’20.2.~3. : 설계심사 완료건 순으로 발주
착 공	’20.3.~ 4. : 공사계약 및 착공 ’20.3.~11. : 공사 시행
예 비 준공검사	공사별 준공 15일 ~ 1개월 전 시행 체크리트에 의한 현장 점검
설계변경	공사별 준공 15일 전 시행 설계변경 심사 실시(사업소 및 본부)
준 공	공사 준공전 준공검사 실시(서울시시설공단) 공사 완료된 공사건별 시행

□  2019년 사고이월 사업

□ 이월사업 : **********************

□ 추진현황

연번	공 사 명	공사개요	사업비 (백만원)	공사 기간	추진율 (완료연장)	잔여 연장	담당자	비고
계		************* ********	******		****** ********	******
1	한남IC~압구정역간외 3개소 송배수관 정비공사	*********** ********	*****	*******************	***** ********	***	***	** ***
2	경기고사거리~봉은사역사거리간외 1개소 송배수관 정비공사	************* ********	*****	******************	***** ********	***	***	** ***
3	개포동 649~653번지외 4개소 배급수관 정비공사	*********** ********	*****	*******************	***** ********	******	***	** ***
4	역삼동 735번지외 11개소 배급수관 정비공사	*********** ********	*****	********************	**** ***	******	***	** ***

Ⅲ	장기계속 단가계약 추진계획

□  계약 방법

※ 관련근거 : 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제21조(장기계속계약)

□ 단가계약의 장기계속 계약시행 방법

- 총 예정물량은 장기계속계약 절차에 따라 2021년 준공시까지의 전체물량으로 하되, 2020년도 12월31일까지의 예정물량과 2021년도 준공시까지의 예정물량을 합산 산출하고 각 연도별 총 소요예산을 명확히 구분하여 발주

- 2021년도 1월부터 준공시까지 집행할 2차년도 예정량에 대하여는 2021년도 예산을 확보한 후, 2021년 1월중에 국가를 당사자로 하는 계약에 관한법률 시행령 제 67조(회계년도 개시전의 계약)에 의거 계약요구

□  계약 기간

□ 2020년도 계약기간(1차수) : 계약일로부터 2020.12.31일까지

□ 2021년도 계약기간(2차수) : 2021.01.01. ~ 준공일까지

□  장기계속 단가계약 발주예정 현황

구 분	공 사 명	공사기간	공사개요	총공사비 (백만원)	발주예정 (월)	비고
계				******
급수공사	신사동외 6개동 상수도공사	********* ***********	*********** ********	*****	*******
	수서동외 14개동 상수도공사	********* ***********	*********** ********	*****	*******
	서초구 관내 상수도공사	********* ***********	*********** ********	*****	*******
시 설 물 공 사	강남구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사	********* ***********	********** *******	*****	*******
	서초구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사	********* ***********	********** *******	*****	*******
누수복구	서초,강남구관내 상수도 긴급누수복구공사	********* ***********	************ ***********	*****	*******
포장복구	강남,서초구관내 포장도로 굴착복구공사	********* ***********	*********	*****	*******

구 분	공 사 명	공사기간	공사개요	총공사비 (백만원)	발주예정 (월)	비고
폐 기 물 처 리	강남구관내 송배수관정비공사 건설폐기물 처리용역	********* ************	*********** ***********	***	*******
	강남구관내 급수공사 등 건설폐기물 처리용역	********* ***********	*********** ***********	***	*******
	서초구관내 송배수관정비공사 건설폐기물 처리용역	********* ************	*********** ***********	***	*******
	서초구관내 급수공사 등 건설폐기물처리용역	********* ***********	*********** ***********	***	*******

끝.