문서번호	시설과-1553
결재일자	2020.2.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
김희원		代전성완	02/24 양희상
협조
	주무관		김애자

서울랜드 분기변전소 교체(3차) 전기공사 관련 정전 작업 계획(수정)

2020. 2.

서울랜드 분기변전소 교체(3차)

전기공사 관련 정전 작업 계획(수정)

서울랜드 분기변전소 교체 전기공사와 관련하여 기상상황으로 인한 야간 근무와 수배전반 교체계획이 바뀌어 수정사항을 보고 드림

□ 관련근거

○ 서울랜드 분기변전소 교체 계획 : 시설과-575호(2020. 1.23.)

□ 공사개요

○ 설치업체 : ㈜골드텍

○ 기    간 : (당초) 2020. 2.24.(월) ~ 3. 2.(월)

→ (변경) 2020. 2.26.(수) ~ 3. 4.(수)

○ 공사내용

- 서울랜드 분기변전소 7개소 교체 시공

□ 보고사항

○ 일정수정 : 우천으로 인한 기상악화로 작업일정 변경

- 2.24(월)~25(화)와 2.28(금) 우천 가능성

- 24~25일은 공사 취소, 28(금)은 목요일에 상황 판단

- 공사일정을 1,2안으로 나누어 추진 시행

□ 야간근무계획

○ 1안 : 2.26.(수) ~ 3. 3.(화)

분기 변전소명	작업일시	시 간 대	비 고
샷드롭, 달나라 열차	2.26(수)	19:00~05:00
캐릭터 연습실	2.27(목)	19:00~05:00
블랙홀2000	2.28(금)	19:00~05:00
대포분수, 요격편대	3. 2(월)	19:00~05:00
통나무무대	3. 3(화)	19:00~05:00

○ 2안 : 2.26.(수) ~ 3. 4.(수)

분기 변전소명	작업일시	시 간 대	비 고
샷드롭, 달나라 열차	2.26(수)	19:00~05:00
캐릭터 연습실	2.27(목)	19:00~05:00
대포분수, 요격편대	3. 2(월)	19:00~05:00
통나무무대	3. 3(화)	19:00~05:00
블랙홀2000	2.28(금)	19:00~05:00

○ 근무인원 : 이춘한, 전성완, 김희원

○ 근무내용 : 분기변전소 교체공사 감독

□ 향후계획

○ 관급자재 검수 및 공사 준공.  끝.