문서번호	도시빛정책과-3455
결재일자	2020.3.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
전문관		도시빛정책팀장	도시빛정책과장
최강욱		김재웅	03/12 김대권
협조	도시빛사업팀장		김세정
	광고물팀장		이양섭

‘서울로 주변 야간경관 활성화 사업’

추진성과 및 향후계획 보고

2020. 3.

도시계획국

(도시빛정책과)

‘서울로 주변 야간경관 활성화 사업’

추진성과 및 향후계획 보고

서울로 주변 야간경관 활성화 사업(5개 사업)의 그간 추진성과 및 향후계획을 보고드림

1. 사업 추진경위

○ 서울시 도시빛 기본계획(’18년)

○ 서울로에서 보는 야간경관 개선계획(’19.6월)

○ 서울로7017 발전방안 관련 현안조정회의 결과(’19.6월,7월)

○ 서울로 루시 빛축제 추진계획(’19.7월)

2. 활성화 사업내용 및 예산현황

① 민․관 협력기반 구축

- 내용 : 민간건물, 전광판, 공공기관 분야별 야간경관개선 협의체 구성

- 예산 : 비예산 사업

② ‘서울 빛축제 2020 @ 서울로 7017’ 개최

- 내용 : 서울 빛축제 2020 개최를 위한 행사대행 용역 등 사업 추진

- 예산 : 2,820백만원 (’20년)

③ 서울로 주변 야간경관 개선

- 내용 : 서울로에서 보이는 야간경관형성을 위한 경관조명 설치 사업

- 예산 : 1,280백만원 (’19년 : 563,  ’20년 : 717)

④ 서울로 주변 옥외광고물 개선

- 내용 : 서울로 주변 난립한 간판 개선

- 예산 : 250백만원 (’20년)

⑤ 서울스퀘어 미디어파사드 개선

- 내용 : 미디어파사드 LED전면 보수 및 영상콘텐츠 개선

- 예산 : 비예산 사업 (민간 투자)

3. 사업별 추진성과 및 향후일정

1		민․관 협력기반 구축

□ 추진현황

○ 분야별 협의체 구성․운영(3개 분야, ’19.9월~)

		상생협력 협의체
민간건물 분야(9)			전광판 분야(7)			공공기관 분야(7)
************************** ****************************** *************************** **************************** ***************			*************************** *************************** ************************* **************			➊공원녹지정책과(시) ➋중부공원녹지사업소(시) ➌서부도로사업소(시) ➍중구 ➎코레일 ➏문체부 ➐문화재청

○ 현장점검을 통하여 야간경관자원의 디자인/효과성/지속가능성 검증

- 조명디자인, 전기설계 전문가 등이(현장검증 기술단) 서울로 주변건물(브라운스톤 등 12개 건물)의 건물외관, 옥상상태, 전력공급 등 검증 완료

- 점검결과를 토대로 야간경관조명 및 빛축제 시설 등 레이아웃 작성

○ 서울로 인근 민간건물 및 전광판 소유주들을 대상으로 방문 설득을 실시하고 사업설명회․간담회 등을 통하여 동참 유도

✜ 민간건물(9개건물)․전광판(7개) 소유주와 우호업무협약 체결(’19.11.28)

- 민간 자원 공유․활용하여 지속가능한 야간경관 협력사업 발굴․추진

- 시설물 설치장소 제공, 전력 공급, 전광판 활용 및 콘텐츠 연출 등

○ 공공부문 시설물 관리기관별로 야간경관개선 협조/합동 추진

- 야간경관시설 시공, 유지관리, 콘텐츠 운영 등 기관별 업무분담 협의

□ 향후일정

○ ’20.04월~      : 축제 콘텐츠 구성에 따른 개별 방문협의

○ ’20.06월, 09월 : 세부축제 계획에 대한 설명회․간담회

○ ’20.10월, 11월 : 축제시설 설치 및 참여 유도

2		서울 빛축제 2020 @ 서울로 7017 개최

□ 행사개요

○ 축 제 명 : 서울 빛축제 2020 @ 서울로 7017

○ 개최예정일 : ’20.11.20(금)~29(일) (10일간)

○ 위    치 : 서울로7017, 만리동․서울역․백범 광장, 주변 건물

○ 연출내용 : 미디어, 무빙라이트, 조명 조형물, IT+음향+통합연출

□ 추진현황

○ 빛축제 정책자문단 운영 및 전문가 (’19.9월~)

- 구성 : 총28명(내부2 : 국장, 과장 - 외부26 : 시의원1, 시민단체2, 전문가23)

⇒ 주요성과 : 빛축제 네이밍, 용역 과업내용 검토, 축제 추진방향 등

○ 빛축제 설계서 작성용역 완료 (’19.10~11월)

- 축제 콘텐츠, 행사장 및 시설 배치 구상

- 행사대행 용역의 과업내용서 작성 등

○ 빛축제 행사대행 용역 추진 (’19.12월~)

- 사전절차 이행 : 일상감사 / 계약심의 / 사전규격공개

- 용역 발주 : 입찰공고(’20.01.16.~02.26. 40일간) / 제안서 평가 /

협상대상자 선정 완료*****************

	< 용역 개요 >
□ 용 역 명 : 서울 빛축제 2020 행사대행 용역 □ 용역기간 : 착수일로부터 ～ ’20.12.31 □ 용역비 : 2,600백만원

□ 향후일정

○ ’20.03.   : 용역 계약

○ ’20.06.   : 축제 프로그램 및 추진일정 확정 / 홍보전략 수립

○ ’20.07.~ : 유관기관 협의 / 홍보․마케팅 추진

○ ’20.08.~ : 공식홈페이지 오픈 / 축제 콘텐츠 중간 평가

○ ’20.10.~ : 각종 매체를 통한 홍보 강화 / 축제시설 설치

○ ’20.11.   : 최종점검 / 기자설명회 / 프레스투어 / 축제 개최

3		서울로 주변 야간경관 개선

□ 사업개요 (’19년 : 2개사업, ’20년 : 3개사업)

연도	사 업 명	사업비 (백만원)	사업내용
’19년	빛의 캔버스	319	문화역서울284 옥상에 프로젝션맵핑 연출
〃	남산육교 환영의 빛	244	남산육교 상·하부 경관조명 설치
’20년	소월로 환영의 빛	180	소월로 150m 구간 야간경관조명
〃	타임캡슐 경관조명	120	남대문교회 외관에 경관조명 11개
〃	빛의 축 경관조명	350	서울로 주변 가로등 상부에 경관조명 설치

□ 추진현황

① 문화역서울284 옥상 빛의 캔버스(완료)

- ‘문화역서울284’ 옥상에서 연출되는 작품을 서울로에서 근접 관람 가능

- 키오스크를 이용하여 시민이 콘텐츠 참여

② 남산육교 경관조명(’20.3. 준공 예정)

- ’20.2월 현장 조명시연 완료

③ 소월로 환영의 빛 경관조명(추진 중)

- 시행부서 : 중구청 건축과, 설계용역 추진 중

④ 타임캡슐 경관조명(추진 중)

- 시행부서 : 도시기반시설본부 설비부, 설계용역 중

⑤ 빛의 축 경관조명(추진 중)

- 시행부서 : 중구청 도로시설과, 설계용역 추진 중

남산육교	남대문교회	소월로	통일로·세종대로·한강대로

□ 향후일정

○ ’20.05. : 설계용역 완료 / 공사 발주

○ ’20.09. : 공사 준공

4		서울로 주변 옥외광고물 개선

□ 사업내용

○ 건    명 : 서울로 주변 난립한 간판 개선

○ 개선구간 : 세종대로 일대(회현동)

○ 사업기간 : 2020.03~2020.10

○ 개선수량 : 100개 점포

○ 소요예산 : 250백만원

☞ 옥외광고물법 제4조의3의 규정에 따라 자치구에서 정비시범구역 지정

※ 중구 중림동 및 남대문시장 일대 개선 완료(`18년)

	➜
[개선 전 예시]		[개선 후 예시]

□ 추진현황

○ 사업계획 수립(’20.1월)

○ 정비시범구역 공람공고 및 표시구역 고시(’20.2월)

□ 향후일정

○ ’20.04 : 간판개선 주민위원회 위촉, 협약체결

✜ 주민위원회 구성․운영

- 구성인원 : 각 구간별 10~15명 내외(건물․점포주 등)

- 주요역할 : 사업추진 방향 논의 등

○ ’20.05 : 업체선정 절차 진행(제안공모)

○ ’20.07 : 제안서평가위원회 개최 및 선정업체 계약

○ ’20.10 : 사업참여 동의서 징구, 간판디자인 협의 및 설치

************************

*************************

******************************

***************************************

*************

***********************************************************************************************************************************************************************************************

*********************************************

*********************

**********************************

*********************************************************************

*******************************************

*****************************

*********************

*******************************

****************************

*****************************************

***********************************

*************************************

****************************************