“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	재무회계과장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 연기 요청(수유6배수지 건설공사)

우리 부서에서 시행중인 『수유6배수지 건설공사』에 소요되는 관급자재 중 아래 구매건에 대한 납품기한 연기를 요청합니다.

1. 변경내용

건 명	납품요구번호 (계약번호)	계약금액(원)	납품기한
			당 초	변 경
관급자재 구매 (레미콘)	12-20-1-11194-00 (12201005000)	3,850,260	2020. 3. 24.	2020. 5. 30.

2. 변경사유 : 관급자재 정산기간 필요로 납품기한 연기.  끝.

	시설과장
주무관	박상권		시설과장	03/24 송병욱
협조자
시행	시설과-3629	(		)	접수		(		)
우	03731	서대문구 서소문로 51 상수도사업본부 시설안전부 시설과	/
전화	02)3146-1497	/전송	02)3146-1529	/	psk300@seoul.go.kr	/	부분공개(6)