문서번호	공간정보과-3135
결재일자	2020.3.26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		공간정보과장	시설안전부장
박광수		유명은	03/26 신용철
협 조
	주무관			홍석현
	주무관			박현대
	주무관			신정민

「2019년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」

준공금(2차수) 지급계획 보고

2020.  3.

시설안전부

(공간정보과)

「2019년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」

준공금(2차수) 지급계획 보고

『2019년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업』용역 추진과 관련하여 준공금(2차수-최종) 지급계획을 보고 드림.

1		개 요

□ 2019년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

❍ 사업현황(측량 및 편집 총 842㎞, 6,894,800천원)

구 분		중부,서부지역	동부,북부지역	강서,남부지역	강남,강동지역
용역내용		측량 및 편집 : 210㎞ (신설31,기존179)	측량 및 편집 : 211㎞ (신설32,기존179)	측량 및 편집 : 211㎞ (신설35,기존176)	측량 및 편집 : 210㎞ (신설26,기존184)
용역기간	총차분	’19. 4. 4. ～ ’19. 12. 31.
	2차분	’20. 1. 1. ～ ’20. 3. 31.
* * * *	***	***********	***********	***********	***********
	***	***********	***********	************	**********
*****		***** ******	******* *****	*************	****** *******

❍ 기성기간 : ’20. 1. 1. ~ ’20. 3. 25.(작업완료 물량)

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비, 사무관리비

2		기성현황

1. ’19년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업(중부,서부)

□ 주요공종 기성물량

공 종	현 황					비 고
	계 약		전회	금회	잔여
	수량	단위
4급 기준점 측량	-	점	-	-	-
신규 상수도 시설물 측량	7.5	㎞	-	7.5	-
기존상수도 지하시설물(조사/탐사)	-	㎞	-	-	-
지하시설물도 정위치 편집	7.5	㎞	-	7.5	-
누수복구 현장 대응	2	건	-	2	-

□ 준공금 지출현황(2차수 계약)

****	*******	***********	********	****
**********	*	**********	**********	*

2. ’19년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업(동부,북부)

□ 주요공종 기성물량

공 종	현 황					비 고
	계 약		전회	금회	잔여
	수량	단위
4급 기준점 측량	-	점	-	-	-
신규 상수도 시설물 측량	5.5	㎞	-	5.5	-
기존상수도 지하시설물(조사/탐사)	2.5	㎞	-	2.5	-
지하시설물도 정위치 편집	8.0	㎞	-	8.0	-
누수복구 현장 대응	2	건	-	2	-

□ 준공금 지출현황(2차수 계약)

****	******	************	*******	****
**********	*	**********	**********	*

3. ’19년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업(강서,남부)

□ 주요공종 기성물량

공 종	현 황					비 고
	계 약		전회	금회	잔여
	수량	단위
4급 기준점 측량	-	점		-	-
신규 상수도 시설물 측량	8.0	㎞		8.0	-
기존상수도 지하시설물(조사/탐사)	-	㎞		-	-
지하시설물도 정위치 편집	8.0	㎞		8.0	-
누수복구 현장대응	3	건		3	-

□ 준공금 지출현황(2차수 계약)

****	******	************	*******	****
**********	*	**********	**********	*

4. ’19년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업(강남,강동)

□ 주요공종 기성물량

공 종	현 황					비 고
	계 약		전회	금회	잔여
	수량	단위
4급 기준점 측량	-	점		-	-
신규 상수도 시설물 측량	7.9	㎞		7.9	-
기존상수도 지하시설물(조사/탐사)	-	㎞		-	-
지하시설물도 정위치 편집	7.9	㎞		7.9	-
누수복구 현장대응	9	건		9	-

□ 준공금 지출현황(2차수 계약)

****	******	************	*******	****
**********	*	**********	**********	*

3		향 후 계 획

□ 각 용역업체의 준공물량 내역에 따라 준공검사 시행

붙임 : 1. 준공 내역서(중부․서부, 동부․북부, 강서․남부, 강남․강동) 각 1부.

2. 준공물량 산출서(중부․서부, 동부․북부, 강서․남부, 강남․강동) 각 1부.  끝.