투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	건설폐기물처리용역 계약변경 의뢰_지역대표 거점형 키움센터(1호) 조성

우리부에서 추진중인『지역대표 거점형 키움센터(1호) 조성공사』와 관련하여 건설폐기물처리용역의 계약기간 연장에 따른 변경계약을 의뢰하오니 확인 후 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명: 지역대표 거점형 키움센터(1호) 건설폐기물처리용역

2. 계 약 자: 태성용아개발(주), 천보산업(주)

*********************

4. 용역기간: 2020. 1. 3. ~ 2020. 6. 30.

5. 변경사항

구 분	변경사항		증/감	변경사유
	변 경 전	변 경 후
****	***********	***********	변경없음	본 공사의 기한연장에 따른 효율적 용역 수행
****	******************	******************	증 62일

붙임  1) 계약변경의뢰서 1부

2) 건설폐기물처리용역 계약기간 연장 검토 보고 1부

3) 합의각서 1부.  끝.

	건축부장
주무관	김용성		건축관리과장	차무흥		건축부장	05/28 임인구
협조자	재무예산과장	홍은미
시행	건축부-8996	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 13층 (무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)3708-2657	/전송	02)3708-2659	/	yskim8103@seoul.go.kr	/	부분공개(5)