문서번호	설비부-8585
결재일자	2020.6.16.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
★주무관		건축설비과장	설비부장
박희준		김은덕	06/16 임정규
협조

『G밸리 근로자 문화복지센터 건립 통신공사』

관급자재(주차관제장치) 구매 계약취소 검토보고

2020. 06.

도시기반시설본부

(설비부)

『G밸리 근로자 문화복지센터 건립 통신공사』

관급자재(주차관제장치) 구매 계약취소 검토보고

『G밸리 근로자 문화복지센터 건립 통신공사』에 설치되는 관급자재(주차관제장치)의 구매 계약취소에 대해 아래와 같이 보고 드림

1		공사개요

□ 공 사 명 : G밸리 근로자 문화 복지센터 건립 통신공사

□ 공사기간 : 1차 2018.04.03.~2020.06.30(총차 2018.04.03.~2020.07.13.)

□ 도 급 비 : 1차 156,890,000원(총차 489,719,386원)

□ 시 공 사 : ㈜새빛전자통신

□ 감 리 사 : ㈜펨코엔지니어링 건축사사무소

2		관련근거

□  PC G밸리 제*******01호(2020.06.02.) : 관급자재 구매계약취소 요청 검토보고

□  물품 다수공급자계약 특수조건 제13조의4(직접생산 의무)

□  설비부 (2020.05.14.)호 『관급자재 관련사항 알림 및 조치계획 검토지시』

3		계약취소 내용

□ 대상 관급자재 계약현황

(단위 :원)

납품요구번호 (계약번호)	품 명	계 약 자	계약금액	납품기한
**************** *************	******	*****	**********	*********

□ 사   유 :****************************************

4		감리단 기술검토 의견

□ 계약당사자의 구매계약 취소요청과 관련하여 물품다수공급자계약 특수조건 제13조의 4(직접생산 의무)2항에 근거하여 해당계약 건을 취소하는 것이 적정하다 판단되며, 해당 관급자재(주차관제장치)는 조달 등록 물품 중 설계 성능에 부합하고 계약금액 예산 내의 업체를 선정하여 재구매하는 것이 타당함.

□ 주차관제장치 사양 및 세부견적 비교

번호	품명	설계규격	단위	수량	당초	A사		B사		비고
						금액	규격	금액	규격
*	*****	***********	*	*	*********	*********	**	*********	**
*	*******	***********	*	*	*********	*********	**	*********	**
*	*******	************ ******************	*	*	**********	**********	**	**********	**
*	*****	*******	*	*	*********	*	**	*	**	****
*	****	**********	*	**	*******	*******	**	*******	**
*	***** *****	*******	*	*	*********	*********	**	*********	**
*	*****	**************	*	*	*******	*******	**	*********	**
*	*****	********	*	*	*******	*******	**	*******	**
*	*******	**********	*	*	*********	*********	**	*********	**
**	*******	*******	*	*	*******	*********	**	*********	**
**	***	************	*	*	*********	*********	**	*********	**
**	*****	******	*	*	*********	*********	**	*********	**
**				**	**********	**********		**********

5		보고자 조치의견

□ 건설사업관리단의 검토보고 내용이 적정하다고 판단되므로, 계약부서에 기존 물품의 계약 취소를 의뢰하고, 설계 규격을 충족하고 예산범위 내의 물품(A사)을 구매 하여 원활한 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 감리단 공문 각 1부. 끝.