문서번호	시설과-4759
결재일자	2020.6.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설과장	관리부장	서울대공원장
김용주	양희상	대결 06/18 오성문	전결
협 조
	전략기획실장		전진수
	총무과장		유연호
	주무관		배진수

해양관 돌고래이야기관 조성

건축공사 제3회 설계변경 보고

2020. 6.

서울대공원

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성인지	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

해양관 돌고래이야기관 조성

건축공사 제3회 설계변경 보고

해양관 돌고래이야기관 조성 공사중 전시수조 연결통로 변경, 출입로 보도블록 포장 등 보완공사 시행 및 물량증감 사항에 대하여 설계변경을 시행하고자 함

Ⅰ		근 거

□ 서울대공원 해양관 돌고래이야기관 조성 건축공사 실정보고의 건*****************

Ⅱ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 해양관 돌고래이야기관 조성 건축공사

□ 계약금액 : ***********

□ 공사기간 : 2019. 10. 31. ~ 2020. 6. 26

□ 계 약 자 :**************

□ 공사내용

○ 지하1층

- 장비 반입구 신설

- 돌고래 전시수조 경사로 및 계단설치

○ 1층

- 해저터널 설치

- 돌고래 전시수조 전시시설 설치

- 돌고래 대기풀에 전시장 설치

○ 관람석

- 에어돔 철골 및 천막철거

- 관람석 의자철거, 바닥방수, 의자 일부 재설치 등

Ⅲ		시설 보완공사 시행

□ 관람석 강화유리 안전난간 핸드레일 설치

○ 현    황 : 장애자 경사로, 계단 등에 대하여 핸드레일 설치 필요함

○ 조치방안 : 장애자 등 안전을 위하여 강화유리 난간에 핸드레일을 설치하고자 함

○ 소요예산 : 190m × 59천원 = 11,200천원

□ 강화유리 안전난간 추가 설치

○ 현   황 : 전시수조 연결통로 철거부분 및 계단은 안전난간 설치불가로 안전난간을 설치하지 못함

○ 조치방안 : 전시수조 관람안전을 위하여 강화유리 안전난간을 설치하고자 함

○ 소요예산 : 30구간 × 640천원 = 19,200천원

□ 수유실 출입구 보도블록 및 경계석 설치

○ 현   황 : 수유실 출입구가 좁아 확장이 필요함

○ 조치방안 : 기존 노후 보도블록을 철거후 진입로 확장 및 보도블록, 경계석을 재설치 하고자 함

○ 소요예산 : 160㎡ × 90천원 = 14,400천원

□ 1층 수유실 레일도어 설치 및 마블세면대 3개 설치

○ 현   황

- 수유실 출입문은 커텐으로 설계되어 있으나 운영과에서 커텐을 레일도어 출입문으로 변경요청

- 수유실 세면대 3개소를 운영과에서 마블 세면대로 교체 요청

○ 조치방안 : 관리부서 의견을 반영하여 출입문 및 세면대를 변경하고자 함

○ 소요예산 : 6,000천원

□ 전시수조 옆 창고지붕 보수

○ 현   황 : 창고 지붕이 노후 및 파손되어 보수가 필요함

○ 조치방안 : 창고 지붕 합판 및 아스팔트 슁글을 교체하고자 함

○ 소요예산 : 20㎡ × 20천원 = 4,000천원

□ 2층 화장실 옆 복도 바닥 및 지붕  보수

○ 현    황 : 2층 화장실 옆 복도 바닥 및 지붕이 노후 되어 누수 우려가 있음

○ 조치방안 : 복도 바닥 타일을 철거하고 미장보수 및 지붕을 보수하고자 함

○ 소요예산 : 60㎡ × 200천원 = 12,000천원

□ 2층 사무실 칸막이 설치, 수유실 캐노피 설치 등 기타공사

○ 현    황 : 동물기획과에서 2층 사무실 사용을 위한 칸막이 설치 요구, 수유실 출입구 캐노피 설치 등의 공사가 필요함

○ 조치방안 : 2층 칸막이 설치, 수유실 출입구 캐노피 설치 등의 보완공사를 시행하고자 함

○ 소요예산 : 16,000천원

□ 공사변경 및 감소부분

○ 현  황 : 전시수조 목재데크 깔기 감소, 전면 출입구 타공판넬 시공 수량 감소

○ 조치방안 : 목재데크 깔기 및 출입구 외벽 타공판넬 설치 수량 감소 부분에 대하여 정산하고자 함

○ 감 액 : 감35,800천원

- 전시수조 연결통로 목재데크 설치 : 감15,700천원

- 주출입구 외벽 타공판넬 수량감소 : 감20,100천원

Ⅳ		소 요 예 산

□ 소요예산 : 47,000천원

구 분	소요예산(천원)
경사로 등 핸드레일 설치 190m 등	11,200
강화유리 안전난간 추가설치 30구간	19,200
수유실출입구 보도블록 포장 및 경계석 설치	14,400
1층 수유실 레일도어설치 및 마블 세면대 설치 3개	6,000
전시수조 옆 창고지붕 보수	4,000
2층 화장실 옆 복도 지붕설치 및 바닥 보수	12,000
2층 칸막이 설치, 수유실 캐노피 설치 등 기타공사	16,000
전시수조 연결통로 목재데크 설치 감소	-15,700
해양관 전면 타공판넬 시공 수량정산	-20,100
합 계	47,000

□ 예산조치

○ 해양관 돌고래이야기관 조성사업 집행잔액을 이용하여 보완공사 시행

□ 예산과목

○ 공원이용시민 만족도 향상, 동물사 관리기능 및 야생동물 종보전, 생태적동물사조성 및 전시환경 개선, 시설비및부대비, 시설비

Ⅴ		조 치 사 항

□ 위와 같이 시설 보완공사 시행 및 물량 증감사항에 대하여 설계변경을 시행하고자 합니다.

붙임 : 실정보고서 1부.  끝.