투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	관급자재(자동제어반-전력및조명제어(1차)) 납품기한 연기요청(마곡산업단지 전기공사)

1. 우리 본부에서 시행하는 “마곡산업단지 공공산업지원시설 전기공사”용 관급자재(자동제어반-전력및조명제어(1차))에 대하여 아래와 같이 납기 연기의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 납품기한 연기요청 내용

계약건명	수량	금액(원)	계약번호 (구매관리NO)	계약자	납품기한		비고
					당초	변경
자동제어반- 전력및조명제어(1차)	1식	**********	*********** *************	**********	‘20.06.30	‘21.06.20

나. 연기사유 : 건축공사 중으로 후속공정인 전기공사용 관급자재(자동제어반-전력및조명제어(1차)) 사용시기 미도래

다. 계약금액 및 수량 : 변경없음

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

따로붙임  1. 감리단 검토서 1부.

	설비부장
주무관	곽용길		열빛총괄과장	여인웅		설비부장	06/19 임정규
협조자	재무예산과장	홍은미
시행	설비부-8755	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8602	/전송	02-3708-8659	/	yong9345@seoul.go.kr	/	부분공개(5)