문서번호	환경정책과-9471
결재일자	2020.7.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
수습사무관	환경교육팀장	환경정책과장
정재현	박성제	07/02 이동률

에너지드림공간 2단계 조성

설계 변경 검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 7.

기후환경본부

환경정책과

서울에너지드림센터

에너지드림공간 2단계 조성 설계 변경 검토 보고

사우디 아람코社 후원으로 진행 중인 『에너지드림 공간 2단계 조성』을 위한 설계 변경 검토 결과를 보고 드림

1		에너지드림공간 조성 개요

❍ 사업명: 에너지드림공간(태양의 놀이터) 조성사업

❍ 조성 목적

- 서울에너지드림센터의 실내·외 공간과 콘텐츠 연계를 통해 시민들이 에너지를 보다 친숙하게 느끼고 경험할 수 있는 공간 마련

- 평화의 공원 내 시민 놀이 문화 공간 확충

- “태양의 도시, 서울” 사업과 연계 구축을 통해 “태양의 공원” 조성에 기여

태양쉼터 (1단계) 화성놀이터 (2단계)	『태양의 놀이터』는 “태양의 도시, 서울”과 연계하여 태양을 느끼고 이해하고 놀며 상상하는 공원 놀이 시설로 ’17년 (주)사우디 아람코 社의 놀이터 조성 제안과 후원(약 1억 2천만 원)으로 시작되어 현재 2단계(최종) 공사 착공 예정임

❍ 1단계 공사 결과

- 준공일: ’18. 10. 11.

- 공사 내용: 태양의 쉼터와 솔라파인 설치

▶ ‘태양의 쉼터’는 기 설치된 지상 태양광 발전시설 하부의 유휴공간을 활용하여 시민을 위한 안정적인 휴게공간으로 조성한 첫 사례로 재생에너지가 일상의 삶과 맞닿는 의미 있는 시도라는 평가가 있음

▶ ‘솔라파인’은 포스코에서 연구·개발한 태양광디자인 조형물로 단순 쉼터를 넘어 태양광 발전을 통해 시민들에게 다양한 기능과 편의를 제공하는 친환경기술과 스마트 IoT기술을 접목

태양의 쉼터(’18.10)	솔라파인(’18.10)

❍ 추진내역: ’17. 11월~현재

- (’17. 11.~’18. 10.) 태양의 놀이터 기본계획 수립

- (’18. 8.~’18. 10.) 태양의 놀이터 1단계 준공 (태양의 쉼터·솔라파인)

- (’20. 4.) 2단계 공사 감리업체 선정, 계약(에코존 종합건축사사무소)

- (’20. 5.~6.) 서부녹지사업소 협의 결과 설계 변경 결정

❍ 향후 추진 일정

- (’20. 7. 7.~’20. 8. 28.) 2단계 조성을 위한 실시 설계

- (’20. 9.) 나라장터 공사 입찰(2단계 조성)

- (’20. 10.~11.) 공사 진행 및 준공

※ 아람코社 후원내역

구 분	후원금액	사용내역
計	282,603천원	․기부완료 : 162,603천원<14만달러> ․기부예정 : 120,000천원<11만달러)
’17.9.21(1차)	81,788천 원	․기본계획 및 마스터플랜 수립 ․실시설계 및 성과보고서 제작 등
’18. 8. 7(2차)	80,815천 원	․태양의 놀이터 1단계 조성공사 ․태양의 놀이터 준공식 비용 등
’19.7월(3차)	약 120,000천 원	․2단계 조성공사 예정

※ 포스코: 솔라파인 시설 기부(부가세 포함 일억 원 상당)

2		2단계 공사 설계 변경 개요

❍ 사업명:『서울에너지드림센터 에너지드림 공간 설계 변경』

❍ 사업 내용: 에너지드림공간 2단계 조성을 위한 실시 설계 변경

❍ 사업 기간: 2020. 7. 7.~8. 28.

❍ 사업 예산: 30백만 원(서울에너지드림센터 운영-민간위탁사업비-에너지드림공간 조성 기반공사, 100-402-03)

❍ 설계 변경 금액: ********************

※설계비 외 금액은 기반 조성 공사에 사용 예정

❍ 용역수행 자격요건: 조경 설계 능력과 유사 사업 실적을 보유한 업체

❍ 시행사: ********

3		주요 설계 변경 내용

❍ 설계 원안: 태양의 미끄럼틀 설치

- 태양을 형상화한 놀이 시설물로 ‘태양의 도시, 서울’에 부합하는 상징적 이미지로 형상화함

<태양의 미끄럼틀>

- 서울에너지드림센터 부지는 공원 내 교양시설로 미끄럼틀 등 놀이 시설이 설치될 경우 공원조성계획 변경(교양시설→유희시설)이 필요

※ 태양의 놀이터 조성 관련 서부녹지사업소 검토 의견(공원운영과-7294)

- 도시공원 및 녹지에 관한 법률 제2조에 의거 월드컵공원 평화의 공원 내 위치한 에너지드림센터는 교양시설로 공원조성계획에 반영되어 있음

- 교양시설은 공원에서 다양한 학술적, 교육적 기능을 할 수 있는 공간으로 공원 조성 방향 및 성격, 이용자의 특성 등 다각적인 활용 방안을 반영하여 에너지드림센터 내 부지에서 에너지체험 관련 교양시설로의 기능에 부합할 수 있는 시설물 도입을 검토할 필요가 있음

- 요청한 사항 “태양의 놀이터” 조성 공사는 도시공원 및 녹지에 관한 법률 시행규칙 제3조에 의거 공원 시설의 종류가 교양시설에서 유희시설로 변경되는 사항으로 공원조성계획변경 절차에 따라 도시공원위원회 심의 대상이며, 관련 절차 이행시 공원조성계획변경 관련 별도 협의가 필요함

- 또한, 미끄럼틀 주변에 모래 등 토사 설치의 경우 친환경 모래를 사용해야 하며 정기적인 안전 검사가 요구되는 등 관리의 어려움이 존재

❍ 설계 변경(안): 토성의 링

- 토성의 링은 태양광 에너지를 이용한 미스트 분사 시설물로 태양의 공원 기획 의도와 배치되지 않으며 교양시설 내 교육 시설물로 설치 가능함

	※토성의 링: 토성의 링 형태의 구조물에 태양광 전기를 공급 받아 빛을 낼 수 있는 조명 시설과 구름 형태를 만들어낼 수 있는 미스트 기능을 갖춘 시설

- 도시 열섬 현상과 미세먼지 완화 효과로 현재 도시 내 미스트조형물 설치는 증가 추세로, 에너지드림센터 내 미스트를 활용한 체험 시설 설치를 통해 환경오염으로 인한 지구 환경 변화에 대한 질문을 던져볼 수 있는 공간 조성

4		설계 변경 검토 결과: 추진

❍ 설계 변경 필요성

- 에너지드림공간의 특색을 살리면서 공원조성계획에 배치되지 않는 시설물로 변경할 필요성이 존재함

- 미스트조형물 설치를 통해 새롭고 안전한 어린이 놀이·체험 공간 조성

❍ 사업추진의 타당성

- 태양의 놀이터 2단계 공사로 태양의 놀이터 조성을 마무리하여 시민들과 어린이들에게 신재생에너지를 체험하는 놀이와 휴식 공간을 제공함으로써 서울에너지드림센터의 신재생 에너지 홍보 활동에 기여할 것으로 평가됨

❍ 용역의 성과물

- 본 용역의 성과물은 태양의 놀이터 2단계 조성 공사 실시설계도면과 설계예산서, 수량산출서, 시방서 등 각종 설계서와 관련 전산자료 일체 등임

- 공개경쟁 입찰을 통한 조성 공사 수행을 위해 정확한 실시 설계 도서가 필요할 것으로 보임

❍ 추진 절차의 적절성

- 본 건 용역은 **********대의 사업으로 지방계약법 시행령 제25조에 따라 수의계약이 가능함

- 계약체결을 위한 계약서, 과업지시서, 수의계약 사유서, 청렴이행서약서 등 관련  서류를 작성·구비함

❍ 선정 업체의 수행 능력

- **********은 조경설계 전문 업체로 추정됨

- 유사용역 수행 실적으로 「***************************************************************************************************************************************************************** 등 조경 설계와 시공 관련 다수의 수행 실적이 존재함

❍ 산출금액의 적정성

- 해당 공사의 추정가격은 ‘산업통상자원부고시 제2019-20호, 실비정액가산방식’에 따른 기술자 인건비와 필요 경비를 바탕으로 산출됨

5		검토 결과 통보

❍ 서울에너지드림센터는 법령 규정을 준수하여 계약을 체결하고 과업기간 내 목표한 결과물이 나올 수 있도록 용역 관리 철저

❍ 계약 체결 및 용역비 지출 시 서울시 재무회계 규칙, 지방계약법 등에 규정된 절차 준수 및 관련 서류 보관

❍ 용역 준공 후 서울시에 결과 보고 이행

❍ 태양의 놀이터 준공 일정에 차질이 없도록 관련 사전 절차 이행 철저

붙임  1. 설계 용역 계약 관련 지도점검 요청 공문 1부.

2. 용역 계약서, 과업지시서 등 관련 서류 각 1부.  끝.