문서번호	기전설비과-2645
결재일자	2020.7.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
이균형		최영조	07/24 전영주
협조

2020년 한강공원 조명시설 유지보수공사 (연간단가)   설계변경(2차) 검토보고

2020. 7.

한강사업본부

(기전설비과)

2020년 한강공원 조명시설 유지보수공사 (연간단가)

설계변경(2차) 검토 보고

한강공원 이용객의 안전과 편의를 위해 시행한 '20년 한강공원 조명 시설 유지보수공사(연가단가) 작업지시에 따른 설계 검토 결과 변경 사항이 발생하여 설계 변경(2차)후 기성 준공처리 하고자 함.

공사개요

○ 공 사 명 : 2020년 한강공원 조명시설 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31

○ 계약금액 : 405,471,000원

○ 도 급 자 : **************

○ 공사내용

• 조명시설 선로정비공사  1식

• 등기구교체 및 신설     1식

• 조명시설 부대공사      1식

설계변경 내용

○ 주요 변경사유 : 공사 작업지시 및 낙찰차액 사용계획 보고

• 추정 설계된 유지보수 물량에 대한 작업지시(1차~5차)에 따른 실제

공사완료 물량으로 변경 조정

• 기전설비과-2065호(2020.6.12.) 낙찰차액 사용계획 보고에 따른

시공물량 조정

○ 설계변경 금액                                        (단위 : 원)

구 분		변 경 전	변 경 후	증 감	비고
도급비	공급가액	368,610,000	375,790,000	7,180,000(증)
	부가세	36,861,000	37,579,000	718,000(증)
	합계	405,471,000	413,369,000	7,898,000(증)

예산과목

한강공원관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 한강공원 조명시설       설치 및 운영, 시설비(100-401-01)

보고자의견

○ 한강공원 조명시설 유지보수공사(연간단가) 작업완료 내역(3차 ~ 5차)에

대하여 설계변경 시행 후 기성 준공(2회) 처리코자 함.

붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 합의서 1부.

3. 제비율 검증 확인서 1부.  끝.