문서번호	한양도성도감-9413
결재일자	2020. 9. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		도성보존팀장	한양도성도감과장
구선이		곽동진	09/16 안중호
협조

<한양도성 혜화문 소화전 설치공사> 관련

상수도 급수 공사 결과 보고

2020. 9.

문 화 본 부

한양도성도감

<한양도성 혜화문 소화전 설치공사> 관련

상수도 급수 공사 결과 보고

한양도성 혜화문 소화전 설치공사 사업추진단계 중 상수도 급수공사를 완료하고 그 결과를 보고 드림

공사개요

○ 공 사 명 : 한양도성 혜화문 소화전 설치공사 상수도 급수공사

○ 공사기간 : ‘2020. 09. 08. ~ 10.

************************************************

○ 시 공 자 : 중부수도사업소

추진경위

○ 2020. 02. 13. :『한양도성 혜화문 소화전 설치계획』 방침수립

(한양도성도감-1649(2020.2.13.)호)

○ 2020. 03. 30. ~ 06. 08. : 설계용역 시행

○ 2020. 06. 24. : 관할소방서 통해 중부수도사업소로 소화전 신설 요청

(종로소방서 재난관리과-4219(2020.6.24.)

○ 2020. 08. 18. : 중부수도사업소 급수공사비 고지서 발급

○ 2020. 08. 19. : 급수공사비 납부

○ 2020. 09. 08. ~ 10. : 중부수도사업소 상수도 급수 공사 시행

공사결과

○ 공사결과 : 상수도 인입 및 지상식 입식 소화전 설치 완료

○ 공사 금액 변경

*************************************************************

- 중부수도사업소에서 추가 금액 발생 통보 및 내역서 송부

- 공사 시행 중 재료(급수관, 소화전 등) 및 복구비용이 추가 소요되어 추가 납부금액 발생(※ 변경내역은 붙임문서 참조)

○ 공사 완료 사진

상수도 급수공사 완료 및 지상식 소화전 설치모습	지상식 소화전 상세

예산상 조치

****************************************

○ 예산과목

- 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존·관리·활용, 한양도성 보존·정비, 한양도성 통합관제망 구축 및 운영-문화재 재난방지시설 구축, 시설비(401-01) :************

향후 계획

○ 2020. 9. 21. ~ 25. : 호스릴 소화전함 설치 공사 시행

○ 2020. 10월 : 한양도성 혜화문 소화전 설치공사 완료(20.7.20.~10.17.)

붙임  상수도 급수공사비 내역서 각 1부.  끝.