“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강북아리수정수센터
수신자	행정관리과장
(경유)
제 목	설계변경(정산) 시행(3, 4계열 슬러지수집기 모터, 감속기 교체공사)

우리 정수센터에서 시행중인 『3, 4계열 슬러지수집기 모터, 감속기 교체공사』에 대하여 아래 같이 설계변경(정산)을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 3, 4계열 슬러지수집기 모터, 감속기 교체공사

2. 도 급 자 : ㈜세기엔지니어링

3. 계 약 일 : 2020. 08. 06.

4. 공사기간 : 2020. 08. 10. ~ 2020. 09. 28.

5. 설계변경(정산)내용

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
도급비	공급가액	70,251,018	67,700,000	감)2,551,018
	부 가 세	7,025,102	6,770,000	감)255,102
	합 계	77,276,120	74,470,000	감)2,806,120

6. 변경사유 : 제경비 서류 확인 정산

7. 예산과목 : 자본적지출, 기계장치,시설비및부대비, 시설비

붙임 1. 설계변경 계획보고  1부.

2. 변경설계서  1부.

3. 계약금액조정 검증확인서  1부.

4. 산업안전관리비 검토결과서  1부.

5. 고용, 산재보험료 완납증명  1부.

6. 안전관리비 사용내역  1부.

7. 합의서  1부.  끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	임근식		정수시설과장	백상희		강북아리수정수센터소장	09/22 신동호
협조자	주무관	김금옥
시행	정수시설과-3044	(		)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171 강북아리수정수센터 정수시설과	/
전화	0231465873	/전송		/		/	부분공개(5)