투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(잔여공사 세부공정표 제출 요청)

1.업무지시현장 : 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 주식회사 천일, 동부엔지니어링 주식회사

2.작 성 일 자 : 2020-09-24 16:09:36

3.지 시 내 용

가. 방재시설부-12592호(2020.9.7.)와 관련입니다.

나. ’20.11.1. 종합시운전이 시행될 예정으로 ’20.10.31. 완료를 목표로 역공정표를 작성하여 공정관리에 철저를 기하여 주시기 바라며, 공정표(PERT/CPM)는 ’20.9.28.(월)까지 제출하시기 바랍니다.

다. 아울러 공사예정공정표는 공사시방서, 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침에 따라 PERT/CPM 기법으로 작성토록 규정하고 있는 바 PERT/CPM으로 분석관리하여 시운전이전 모든 공사가 완료될 수 있도록 조치하고, 부진공정은 공정만회대책을 수립시행하고 계획서를 제출하시기 바랍니다.  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							유시혁			환경시설과장					오열상					방재시설부장					09/24 代김태중
협조자
시행			방재시설부-13507									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부															/
전화		02-3708-8784						/전송								/													/	대시민공개