문서번호	주거환경개선과-12571
결재일자	2020. 10. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주거환경계획팀장	주거환경개선과장
김남경		이상구	10/05 김장수
협조

도봉구 도봉동(안골마을) 관리형 주거환경개선사업

정비기반시설 공사비 추가 재배정 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 10.

도시재생실

(주거환경개선과)

도봉구 안골마을 관리형 주거환경개선사업

정비기반시설 공사비 증액 검토보고

도봉구 안골마을 관리형 주거환경개선사업 정비기반시설공사 추진 관련, 자치구로부터 공사비 증액 요청이 있어 조치코자 함

□ 대상지 개요

○ 위    치: 도봉구 도봉동 350번지일대

○ 면    적: 25,852,.8㎡

○ 용도지역: 제1종 일반주거지역

○ 건축물 및 가구: 67개동 /110가구

□ 사업 추진경위

○ ’09. 12. 31.	: 새동네·안골 지구단위계획 결정

○ ’16. 1. 22. : 사업대상지 선정

○ ’19. 8. 8.	: 정비구역 지정 및 지형도면 고시(서울시고시 제2019-268호)

○ ’20. 5.	: 정비기반시설 설계 용역 완료

○ ’20. 8. 12.	: 정비기반시설 공사 계약 및 착공

- 공사의 내용

구 분	*******	*******
*		*******
****	***********************************************	*******
****	**********************************	******
****	************	******
*****	****************	******

□ 설계변경 사항(자치구 요구)

***************************

*****************************

*****************************

○ 도로 개설공사와 정비기반시설 공사의 공사시기 불일치로 인해 기관별 공사 부담부분 일부 변경

- 공정별 공사비 분담 변경

정비기반시설 공사(하수도 등 정비)	(일부)	우리 과 → 도로개설 부서
도로 개설공사(부지매입, 포장 등)	(일부)	도로개설 부서 → 우리 과

*******************

○ 계획(안) 및 현황사진

계획(안)	현장사진

□ 검토의견

*************************************************

○ 기타 도로 개설공사와 정비기반시설공사 간 시기가 맞지 않아 당초 금액 내에서 공사내용을 상호 변경하는 사항임

□ 행정사항

○ 자치구에 예산 재배정

- 재배정처	: 도봉구청(도시계획과)

***********************

- 예산과목	: 주거환경개선과, 평생살고싶은마을만들기 추진, 주거지 재생사업, 관리형 주거환경개선사업, 시설비

○ 자치구 예산 집행

붙임 : 예산요청 공문(자치구) 1부.  끝.