문서번호	한양도성도감-10251
결재일자	2020. 10. 13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
★주무관	도성보존팀장	한양도성도감과장
구선이	代이재익	10/13 안중호
협 조

한양도성 혜화문 소화전 설치 완료 보고

2020. 10.

문 화 본 부

한양도성도감

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	관련기관 자문
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	문화재청 재난안전예산
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

한양도성 혜화문 소화전 설치 완료 보고

한양도성의 목조건축 문화재인 혜화문의 재난방재 및 시민과 순성객의 안전을 위한 소화전 시설 설치를 완료 하고 결과를 보고 드림

Ⅰ		사업개요

□ 사 업 명 : 한양도성 혜화문 소화전 설치공사

□ 사업내용

- 소방용수 확보를 위한 상수도 인입공사

- 혜화문 반경 40m 이내에 옥외소화전(호스릴) 1개소 설치

□ 사업기간 : 2020. 3. ~ 2020. 10.

□ 총소요예산 : 22,161,300원(국비 15,512천원, 시비 6,648천원)

① 소화전 설치공사 설계

· 사업자 : ㈜극동문화전기설계*********

· 계약금액 : 3,400,000원

· 사업기간 : 2020. 3. 30. ~ 6. 8.

② 상수도 인입공사

· 사업시행 : 중부수도사업소 시설관리과

· 납부금액 : 11,061,300원

· 사업기간 : 2020. 9. 8. ~ 9. 10.

③ 소화전함(호스릴소화전) 설치공사

· 사업자 : ㈜소방지인********

· 계약금액 : 7,700,000원

· 사업기간 : 2020.7.20. ~10. 17.

Ⅱ		추진경위

□ 2019. 08. 14. : ‘소방시설 미설치 대상’ 재난안전 관리사업 예산 신청 요청(문화재청 안전기준과-4371(2019.8.14.)호)

□ 2019. 08. 21. : 문화재 재난방지시설 구축 예산 신청

(중부수도사업소와 상수도 인입공사 소요예산 등 사전 협의 완료)

□ 2020. 02. 13. :『한양도성 혜화문 소화전 설치계획』 방침수립

(한양도성도감-1649(2020.2.13.)호)

□ 2020. 03. 30. ~ 06. 08. : 설계용역 시행

□ 2020. 06. 24. : 관할소방서 통해 중부수도사업소로 소화전 신설 요청

(종로소방서 재난관리과-4219(2020.6.24.)

□ 2020. 09. 08. ~ 09. 10. : 중부수도사업소 상수도 급수 공사 시행

□ 2020. 07. 20. ~ 10. 05. : 소화전함(호스릴) 설치 공사시행

□ 2020. 10. 06. : 준공검사 시행

Ⅱ		공사결과

□ 상수도공사 : 소화용수 확보를 위한 상수도 배관 인입공사 시행

- 상수도 배관공사 : 상수도관 31m 신설(D=25mm)

- 지상식 옥외소화전 1기 설치

□ 소화전함(호스릴) 설치

- 호스릴 옥외소화전함 1개소(혜화문 반경 40m이내) 및 위치표시등 설치

기존 상수도관(파란 실선) 및 상수도관 신설(빨간 실선)	혜화문 설치완료 옥외 호스릴소화전 모습

Ⅲ		향후계획

□ 2020. 10. : 혜화문 소화전 시설 관리전환 시행(종로구 문화과)

붙임.  1. 준공 도면 1부

2. 준공 사진첩 1부. 끝.