문서번호	시설보수과-3720
결재일자	2020. 10. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
신재현	우배용	代우배용	10/22 한성현
협 조
	주무관		박성욱

준공기한 연기 검토 보고

(근무환경개선공사)

2020. 10.

난지물재생센터

(시설보수과)

준공기한 연기 검토 보고

(근무환경개선공사)

「근무환경개선공사」 관련하여 준공기한 연기의 필요성이 있어 다음과 같이 보고 드림

1		관련근거

○ 서울시설공단 공사감독2처-16378(2020.10.22.) 준공기한 연기 검토보고서 제출

2		공사개요

○ 공 사 명: 난지물재생센터내 근무자운영실 및 작업실 근무환경개선공사

○ 계약업체: ㈜정건 대표 정성준

○ 계약기간: 2020. 5. 28. ~ 2020. 10. 31.

○ 계약금액: 금1,226,811,900원

(도급비 1,201,909,900원, 관급비 24,902,000원)

○ 공정율 : 93%

3		준공기한 연기검토

○ 연기사유:

-  금년 6~9월 장마(56일 우천)으로 인한 공사지연

-  단면보수 및 균열보수 위치 변경에 따른 적정위치 재 선정

(가설비계 구조 검토, 공사 준비 등)

○ 검토의견: 연기 요청 사유가 적합하다고 판단됨.

○ 계약변경 내용

구분	변경 후	변경 전	비고
계약금액	1,201,909,900원	1,201,909,900원	변경없음
계약기간	2020. 5.28. ~ 2020.10.31.	2020. 5. 28. ~ 2020. 12. 10.	40일 연장

○ 공기연기 귀책사유 : 서울특별시 난지물재생센터

(귀책사유 : 우천 및 단면·균열보수 위치 변경에 따른 적정위치 재 선정으로 공기 부족)

○ 지체상금 부과여부: 미부과

4		행정사항

○ 관리과에 계약기간 변경 의뢰.

붙임 : 서울시설공단 준공기한 연기 공문 1부.  끝.