(발주처 작성서식)

실정보고 검토서

공 사 명

올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선 공사(조경)

공사개요

· 위    치 : 송파구 풍납동 일원

· 규    모 : 램프신설 1.3km 및 이설 1.3km

· 공사기간 : ‘16.04~’21.12.31.

· 공 사 비 : 555억원(조경 13억)

· 시공사 : 대보건설(주) 외 2

· 감리단 : ㈜이산 외 2

· 설계사 : ㈜대한컨설턴트

실정보고 건명

아산병원 앞 한가람로 띠녹지 관계기관 협의 의견 반영 실정보고

(올대감20-258(2020.11.03.))

실정보고 사유

① 아산병원 요구사항(민원) : 신설된 경관옹벽과 보도 사이 녹지로 복구

(서울아산(시설)-060310(2020.06.17.))

② 송파구청(유지관리기관) 협의 의견 반영

(송파구 공원녹지과-16191(2020.08.26.))

건설사업관리단

검토의견

서울아산병원 민원 및 송파구청 협의 의견을 반영하여 정온시설에 적합한  녹지를 조성하기 위한 실정보고 건으로 사유 및 수량, 단가적용이 적정한 것으로 판단됨

공기에 미치는 영향

해당없음

변경(안)

수량 변경

구 분		단 위	수 량			비 고
			당 초	변 경	증·감(△)
식재공	교목	주	0	30	30	이팝 등 3종
	관목	주	600	2,630	2,030	남천 등 7종
	초화	본	0	580	580	담쟁이 등 3종
토공(토양치환)		㎡	0	265	265	치환 265㎡ (깊이 0.5m)

예산 변경

(단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증·감(△)	비 고
식재공	교목	0	11,006	11,006
	관목	3,170	20,021	16,851
	초화	0	1,138	1,138
토공			3,921	3,921
소계(직접비)		3,170	36,086	32,916
간접비		1,130	12,014	10,884
합계		4,300	48,100	43,800

예산조치 계획	당초 도급비 범위내 시행가능 ( ) 당초 사업비 범위내 시행가능 ( ○ ) 별도(추가) 예산 확보 필요 ( )
추가 행정절차 이행 필요여부	해당없음(승인 통보 후 설계변경 시행)
발주처 검토의견	- 본 실정보고 사항은 민원사항(서울아산병원) 및 유지관리기관(송파구)의 요구사항 반영을 적정하게 검토한 것으로 판단되어 실정보고 승인처리하고, 원활한 공정추진을 위해 우선 공사시행하고 향후 설계변경 반영코자 함. - 신규공정 사항은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제74조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)4항 3에 의거 협의율(85.98%) 적용함.
비 고	붙임 : 관련 공문 1부. 끝.
결재	주무관	김시내	공원시설과장	이병호	방재시설부장	11/12 박홍봉
협조	주무관	김규희