문서번호	도시철도설비부-11164
결재일자	2020. 11. 30.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

		시 민
주무관	정보통신과장	도시철도설비부장
정덕환	추경수	11/30 김영수

하남선(5호선연장) 정보통신공사 1단계구간 설계변경(총차2회,3차1회) 검토보고

2020. 11.

- 하남선(5호선연장) 정보통신공사 1단계구간 -

설계변경(총차2회,3차1회) 검토보고

하남선(5호선 연장) 정보통신공사 1단계구간 시행중 본부 지시사항, 현장여건 변경 등 설계변경 사항에 대해 ‘설계변경자문위원회’ 자문결과를 반영하여 설계변경을 추진하고자 함

Ⅰ		사 업 개 요

❍ 공 사 명 : 하남선(5호선연장) 정보통신공사 1단계구간

❍ 공사규모 : 본선 4.7km, 3개정거장 및 입출고선 통신설비공사

❍ 시 공 사 : ******************

❍ 계약현황

(단위:천원)

구 분		총 차	1 차(준공)	2 차(준공)	3차	비 고
1단계구간	공사기간	‘18.05.14 ~ ‘21.05.12	‘18.05.14~ ‘19.05.31	‘19.06.01 ~ ‘20.02.29	‘20.03.1. ~ ‘21.05.12
	도급금액	5,379,688	3,000,000	1,693,150	686,538

❍ 감리단 : 대한엔지니어링㈜

Ⅱ		관 련 근 거

❍ 설계변경 자문요청 (서지 하남선(감) 제20-328호, ‘20.10.29)

❍ 하남선 정보통신공사 1단계구간 설계변경(2차)에 따른 계약변경(총차,3차) 요청 (서지 하남선(감) 제20-379호, ’20.11.27)

Ⅲ		추 진 경 위

❍ ’20.09.28 : 정거장 통신설비(일반통신 등 5건) 실정 검토보고

❍ ’20.11.04 : 설계변경자문(소)위원회 개최

❍ ’20.11.12  : 설계변경자문(소)위원회 자문결과보고

❍ ’20.11.19  : 설계변경 자문결과 조치결과 보고(감리단→본부)

Ⅳ		설계변경 주요내용

설계변경 사항

공 종	설계변경 사유	증감(원)	비고
********************** *****	*******	**********
*******************	*******	**********
*******************	********	**********
**********************	********	*********
*****************	**********	**********
********	********	*********
**********	********	**********
******		***********
*******************	****************	***********
	****************

설계변경 금액

[단위:원]

공 정 별	도 급 금 액(총차)			도급금액(3차)
	당 초	변 경	증 감 액	당 초	변 경	증 감 액
총공사비	***************	***************	************	***********	*************	***********
1) 직접비	**************	**************	************	***********	***********	***********
- 재료비	************	************	***********	***********	***********	**********
- 노무비	***************	***************	*************	***********	***********	***********
- 경 비	************	************	***********	*********	**********	*********
2) 간접비	*************	*************	***********	***********	***********	**********
3) ESC	*	***********	***********	*	***********	***********

❍ 설계변경 자문(소)위원회 자문결과 반영, ESC 정산

공 종	자문위원회 자문결과	변경전	변경후	증감액
ESC	- 1,2차 설계변경에 따른 감액대상 발생분 ESC정산 - 제경비(보험료 등) 정산분에 대한 ESC정산	************	************	*************

공종별 예산내역(총차)

[단위:원]

NO	공 종	구간	당초 공사비	변경 공사비	증.감액
1.1	본선통신설비	본선	**************	***************	*
1.2	철도통합무선설비	본선	************	*************	*
1.3	연선전화 및 터널비상방송	본선	*************	*************	*
1.4	복합통신설비	본선	*************	*************	*
1.5	본선 선로전환기 감시카메라	본선	************	************	*
2.1	전화설비	H1정거장	*************	************	************
		H2정거장	*************	************	************
		H3정거장	************	***********	************
2.2	인터폰설비	H1정거장	************	***********	*******
		H2정거장	************	***********	**
		H3정거장	************	***********	**
2.3	콜폰설비	H1정거장	************	***********	**********
		H2정거장	************	***********	**********
		H3정거장	************	***********	**********
2.4	접지설비	H1정거장	************	***********	**
		H2정거장	************	***********	**
		H3정거장	***********	**********	**
2.5	방송설비	H1정거장	************	***********	***********
		H2정거장	************	************	**********
		H3정거장	************	************	***********
2.6	화상전송설비	H1정거장	************	************	***********
		H2정거장	************	************	***********
		H3정거장	************	***********	***********
2.7	행선안내설비	H1정거장	************	***********	**
		H2정거장	************	***********	**
		H3정거장	************	***********	**
2.8	TV공시청설비	H1정거장	***********	***********	**********
		H2정거장	***********	***********	***********
		H3정거장	***********	***********	**********
2.9	복합통신설비	H1정거장	************	***********	**********
		H2정거장	************	***********	**********
		H3정거장	*************	************	**********
2.10	출입통제설비	H1정거장	************	***********	**********
		H2정거장	************	***********	**********
		H3정거장	************	***********	********
2.11	자동요금징수설비	H1정거장	************	***********	********
		H2정거장	************	***********	**********
		H3정거장	************	***********	**********
2.12	철도통합무선설비	H1정거장	*************	************	********
		H2정거장	************	***********	***********
		H3정거장	************	***********	***********
2.13	경영정보시스템 및 안전구역(H1정거장)	H1정거장	********	************	**************
		H2정거장	********	**********	********
		H3정거장	***********	**********	********
2.14	가설공사비	H1정거장	**********	**********	*
	직접공사비		**************	**************	************
	간접공사비		*************	*************	***********
	공사비 계		*************	*************	***********
	1차 ESC			***********	***********
	2차 ESC			**********	**********
	총 공사비		***************	***************	************

도급 금액 총괄

[단위:원]

구 분		설 계 변 경 금 액			계약기간	비 고
		당 초	변 경	증감
총 차		***************	***************	************	***********************	****
차수	1차	*************	*************	***********	***********************	****
	2차	*************	*************	*	***********************	**
	3차	***********	*************	***********	************************	****

감리단 검토의견

❍ 하남선 정보통신공사(1단계구간) 설계변경(2회) 자문 조치결과에 따른 계약변경 내역 검토결과 적정한 것으로 판단됨

Ⅴ		조 치 계 획

❍ 설계변경 자문위원회 자문결과가 적정하게 반영되었고, 설계변경도서에 대한 감리단 검토결과 적정하다는 의견에 따라,

❍ 설계변경(2회)에 따른 총차 및 3차계약 설계변경 시행 및 계약변경을 의뢰하고자 함(도철설비부 → 총무부)

붙임 : 계약변경 요청 1부.  끝.