코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	예산담당관
(경유)
제목	예산변경(통계목간 조정) 승인 요청

1. 교량안전과-17955(2020.12.3.)호와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 추진중인 중차량노선 시설물 성능개선 사업(개봉고가)과 관련하여 부족 감리비 확보를 위해 예산변경을 요청하오니, 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 예산변경 요청내역

1) 예산과목 : 교량관리, 일반교량관리, 중차량노선시설물 성능개선, 시설비/감리비

2) 변경사유 : 현장 실정에 맞는 건설사업관리기술인 투입인원 조정으로 부족 감리비 확보

3) 변경내역                                                              (단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
합 계	3,750,000	3,750,000	-
시설비	2,489,000	2,461,300	△27,700
감리비	1,261,000	1,288,700	27,700

붙임 : 검토보고서 1부.  끝.

	교량안전과장
주무관	김용태		교량기획팀장	박동욱		교량안전과장	12/03 하현석
협조자
시행	교량안전과-17973	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 세종대로 110. 서울시청 8층	/
전화	2133-1947	/전송	2133-1429	/	polar68@seoul.go.kr	/	부분공개(5)