문서번호	기전설비과-11673
결재일자	2020. 12. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
곽대근		최강욱	12/14 서대훈
협 조

뚝도정수센터 탈수설비 개량 사업

설계변경(기간연장) 시행계획 보고

2020. 12.

상수도사업본부

(생산부)

뚝도정수센터 탈수설비 개량 사업

설계변경(기간연장) 시행계획 보고

뚝도정수센터 탈수설비 개량사업 추진 중 침전지 및 농축조 청소로 인한 탈수기 철거작업 지연으로 아래와 같이 계약기간을 연장하고자함

Ⅰ		사업개요

○ 건  명 : 뚝도정수센터 탈수기 제작구매 설치

- 기    간 : ‘20. 5. 19. ~ ’20. 12. 18.

- 계 약 자 : (주)동일캔바스엔지니어링 대표 우현직

- 금    액 : 금1,019,200,600원

- 사업내용 : 탈수기 6대 철거 및 탈수기 4대설치, 컨베이어 2대 설치

○ 건  명 : 뚝도정수센터 탈수설비 개량 기계공사

- 기    간 : ‘20. 6. 9. ~ ’20. 12. 18.

- 계 약 자 : (주)현대엠이씨 대표 나종식

- 금    액 : 금757,360,940원

- 사업내용 : 펌프, 배관, 작업대 등 공사

○ 건  명 : 뚝도정수센터 탈수설비 개량 전기공사

- 기    간 : ’20.07.01. ~ ’20.12.19.

- 계 약 자 : (주)한양케이앤이 대표 김홍인

- 금    액 : 금231,452,780원

- 사업내용 : 탈수기, 펌프, 유량계 전원 및 통신공사

Ⅱ		변경내용

○ 계약기간 연장 사유

- 뚝도정수센터 침전지 및 농축조 청소(‘20.11.2. ~ ’20.12.12.)로 탈수기 철거 작업 지연

○ 귀책사유 : 상수도사업본부

○ 설계변경(계약기간 연장) 내용

건 명	계약기간		계약금액	비고
	변경(전)	변경(후)
뚝도정수센터 탈수기 제작구매 설치	‘20.5.19. ∼ ‘20.12.18.	‘20.5.19. ∼ ‘20.12.28.	1,019,200,600	계약 금액 변경 없음
뚝도정수센터 탈수설비 개량 기계공사	‘20.6.9. ∼ ‘20.12.18.	‘20.6.9. ∼ ‘20.12.28.	757,360,940
뚝도정수센터 탈수설비 개량 전기공사	‘20.7.1. ∼ ‘20.12.19.	‘20.7.1. ∼ ‘20.12.28.	231,452,780

Ⅲ		행정사항

○ 본부 재무과에 변경계약(계약기간 연장) 의뢰하여 재계약

붙임 : 사업 건별 설계변경 동의서 각 1부.  끝.