아름다운 변화, 열린 구정, 행복도시 서대문
		서대문구
수신자		내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행([골목길 재생 환경개선공사(폐기물처리 용역)]

우리구에서 시행 중인 「골목길 재생 환경개선공사(폐기물처리 용역)」의 설계변경을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 골목길 재생 환경개선공사(폐기물처리 용역)

나. 공사기간 : 2020. 8. 7.~ 2021. 2. 2

다. 변경사유 : 공사 진행에 따른 계약 물량 변경 및 설계서(도면)과 현장여건의 상이에 따른 신규공종 반영(토목 공사량의 증가)에 따라 폐기물 처리 물량 증가

라. 설계변경

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 감
총용역비(폐기물처리)		31,038,000	36,313,000	증) 5,275,000
도급비	공급가액	28,216,364	33,011,818	증) 4,795,454
	부가가치세	2,821,636	3,301,182	증) 479,546
	합 계	31,038,000	36,313,000	증) 5,275,000 • 시비:4,795,460 • 구비: 479,540

마. 예산과목 : 도시재생과, 지역균형 발전을 위한 권역별 도시재생, 충현·북아현도시재생사업, 골목길재생사업, 시설비 및 부대비, 시설비

붙 임 : 1. 설계변경 사유서 1부

2. 설계변경 내역서 1부

3. 합의각서 1부

4. 폐기물 처리 실정보고서 및 설계변경내역서 검토보고(천연동 골목길 재생 환경개선공사). 1부.

5. 골목길 재생 환경개선공사[(토목/폐기물처리)/조경]설계변경 검토결과 및 낙찰차액 사용계획. 1부.   끝.

주무관							김상홍			천연충현도시재생팀장					代김용진					도시재생과장					염봉선						도시재생국장					12/22 박성주
협조자				주무관						정경자					계약팀장							이향란					재무과장								代김철수
시행			도시재생과-5498									(						)		접수													(					)
우	03718					서울특별시 서대문구 연희로 248															/
전화		02-330-4397						/전송								/	bluecaffe@sdm.go.kr														/	부분공개(5)