(발주처 작성서식)

실정보고 검토서

공 사 명

올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선 공사(조경)

공사개요

· 위    치 : 송파구 풍납동 일원

· 규    모 : 램프신설 1.3km 및 이설 1.3km

· 공사기간 : ‘16.04~’21.12.31.

· 공 사 비 : 555억원(조경 13억)

· 시공사 : 대보건설(주) 외 2

· 감리단 : ㈜이산 외 2

· 설계사 : ㈜대한컨설턴트

실정보고 건명

올림픽대로 본선 지장수목 관계기관 협의의견 설계반영 실정보고

(올대감20-325(2020.12.18.))

실정보고 사유

① 배수구조물 시공에 따른 지장수목 협의 의견 반영

(도로시설과-10307(2020.09.11.))

② 한가람로 진입램프 신설로 도로선형 변경에 따른 지장수목 협의 의견 반영

(서울시설공단-7672(2020.11.18.))

건설사업관리단

검토의견

- 배수구조물 시공 및 도로선형 변경으로 인한 지장수목에 대해 관계기관(도로시설과, 서울시설공단)의 협의의견을 설계에 반영함

- 신규공정 사항은 공사계약일반조건(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 의거 협의율(85.98%) 적용함.

공기에 미치는 영향

해당없음

변경(안)

- 수량 변경 및 예산 변경

(단위 : 주, 천원)

구 분		규격	단위	수량 및 예산변경			비 고
				당 초	변 경	예산 증·감(△)
수목제거		느티(B40)	주	-	1	603	기존단가
이식	소나무 (장송)	R40	주	-	1	1,012	신규비목
	소나무 (장송)	R50	주	-	2	2,514	신규비목
직접비			천원	-	4,129	4,129
간접비			천원	-	1,571	1,571
도급비			천원	-	5,700	5,700

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 (    )

당초 사업비 범위내 시행가능 ( ○ )

별도(추가) 예산 확보 필요   (    )

추가 행정절차 이행 필요여부	해당없음
발주처 검토의견	- 올림픽대로 배수구조물 시공 및 한가람로 연결램프 신설에 따른 도로선형 변경으로 발생한 지장수목에 대한 유지관리기관의 요구사항을 적정하게 검토한 것으로 판단되어 실정보고 승인처리하고, 향후 설계변경 반영코자 함.
비 고	붙임 : 1. 관련 공문 1부. 2. 신규비목 단가협의 회의록 1부. 끝.
결재	주무관	김시내	공원시설과장	이병호	방재시설부장	12/24 박홍봉
협조	주무관	김규희