문서번호	계약심사과-22565
결재일자	2019.12.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	토목심사2팀장	계약심사과장		재무국장
박홍	노형근	김수정		12/30 代서은경
협 조

월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완 실시설계 설계 경제성 심사(VE) 결과보고

2019. 12.

재   무   국

(계약심사과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	■	□	시설물 안전관리 검토
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완 실시설계

설계 경제성 심사(VE) 결과 보고

도시기반시설본부(토목부) 시행「월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완 실시설계」에 대한 설계 경제성 심사(VE) 결과를 보고 드림

1		심사 요청 개요

□ 신청 부서 및 일자 : 도시기반시설본부 토목부(2019.11.14.)

□ 사업 내용

ㅇ 용  역  명 : 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완 실시설계

ㅇ 위    치 : 영등포구 양평동(월드컵대교 남단)

ㅇ 주요내용 : 월드컵대교 남단 접속도로 도로여건 변화 반영설계

- 규    모 : 월드컵대교 남단 연결로 – 램프신설, 위치 및 교량형식 변경

남단접속교 – 연결로 신설 및 변경에 따른 종단 검토

ㅇ 총사업비 : 131,675백만원

ㅇ 사업기간 : ’18. 9.~’21. 12.

ㅇ 설계공정률 : 90%

2		심사 개요

□ 심사기간 : ’19. 11. 21. ～ ’19. 12. 30.(기간 중 3일)

□ 장      소 : 도시기반시설본부 회의실 및 서울역

□ 전문가구성 : 9명(외부전문가 7명, 내부공무원 2명)

□ 심사내용

- 건설공사의 설계, 시공, 유지관리 등 경제성 분석

- 공사 시행의 적정성, 시설물 안전성 검토

- 시설물 안전 및 이용자 편의성 반영 등

3		심사 결과

① 성능향상 : 아이디어 61건을 제안하여 42건 채택【채택률 68.8%】

② 비용절감 : 공사비 131,675백만원에서 1,488백만원 절감【절감률 1.13%】

□ 설계VE 검토결과

- 유형별 제안건수 및 절감액

(단위: 건, 백만원)

	시공성 향상	건 수	8
		증감액	-941
	안전성 강화	건 수	1
		증감액	5
	이용편의성 향상	건 수	1
		증감액	-186
	유지관리성 향상	건 수	3
		증감액	-97
	경제성 향상	건 수	3
		증감액	-255
	에너지절약성	건 수	1
		증감액	-14
	설계 보완	건 수	25
		증감액	-

- 비용절감 및 가치향상

(단위: 점, 백만원)

비 용(C)			성 능(P)			가 치(V=P/C)
공사비	절감액	절감률	원안	대안	개선율	원안	대안	향상률
131,675	1,488	1.13%	100	129.4	29.4%	100	130.9	30.9%

- 주요 대안내용

1)【안전성향상】세로보를 추가설치하자 (세로보 간격 3m이상 → 3m이내 변경) ․ 증가액 : 5백만원 ⇒ 확폭구간의 가로보 간격을 3m 이내로 추가설치하여 사용성 및 안전성을 향상시킴	↓

2)【시공성향상】덮개 우수 빗물받이 배수관을 반영하자 (빗물 자유낙하 → 배수관 설치) ․ 증가액 : 35백만원 ⇒ 지붕의 빗물처리 배수관을 반영하여 유지관리성 및 시공성을 향상시킴	↓

3)【경제성】기반암에 근입되는 현장타설말뚝 길이를 최적화 하자 (근입깊이 21m → 16m로 조정) ․ 절감액 : 26백만원 ⇒ 기반암에 근입하는 말뚝길이를 적정 근입으로 재산정하여 예산절감 및 경제성을 향상시킴	↓

4		행정 사항

□ 설계경제성 심사 결과통보 : 도시기반시설본부 토목부

붙임 1. 설계 경제성 심사 제안 채택목록 1부.

2. 설계 경제성 심사 결과 보고서(별도) 1부.

3. 설계 경제성 심사 참여자 목록 1부.  끝.