문서번호	생태환경과-2530
결재일자	2021. 5. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		생태환경과장	공원부장
장창수		이정환	05/12 김상국
협조
	주무관		박웅교

- 뚝섬·망원한강공원 자연(형)호안 복원사업 - 공사현장 실정보고(조경)에 대한 검토보고

2021. 5

공   원   부

(생태환경과)

- 뚝섬·망원한강공원 자연(형)호안 복원사업 -

공사현장 실정보고(조경)에 대한 검토보고

한강의 자연성을 회복하기 위하여 시행중인「뚝섬·망원한강공원 자연(형)호안 복원사업」과 관련하여 서울시설공단의 공사현장 실정보고(조경)에 대하여 아래와 같이 검토하고 그 결과를 보도드림.

※ 서울시설공단 공사감독3처-3312(2021.5.4.)

▢ 공사개요

○ 공 사 명 : 뚝섬·망원한강공원 자연(형)호안 복원사업

○ 공사기간 : 총차 2020. 4. 1 ~ 2021. 11. 30 (2차 : ’21.1.4~11.30)

○ 공사내용 : 자연형 호안 복원, 수변식생대 개선, 수목식재 등

○ 도 급 비 : 총차 3,469백만원 (2차 : 1,744백만원)

- 2차 1,774,004,000원(토목 : 1,406,791,000원, 조경 : 367,213,000원)

○ 도 급 자 : 주계약자 공동도급

┍ 주계약자(토목) : 을묘종합건설(주) 대표 임주현

┗ 부계약자(조경) : (주)뜨레엔지니어링 대표 이상님

○ 공사감독 : 서울시설공단(공사감독3처)

▢ 실정보고 내용 및 검토결과

[뚝섬한강공원]

구 분	실정보고 내용	검토결과	비 고
식재공사	○ 해넘이 쉼터 구간 쾌적한 이용환경 제공을 위해 그늘목 식재 및 잔디 식재 필요	********************* *************************** *********************************	승 인
	○ 해넘이 쉼터 구간 소나무 식재패턴(산재 → 군식) 조정에 따른 흙쌓기 물량 및 하부식재 수종 조정 필요	*********** *************************** ********************* ************************ ************************

구 분	실정보고 내용	검토결과	비 고
식재공사	○ 식생매트 식재구간 사면 미관향상을 위해 자전거로도변 상단부 꽃피는 초종 식재 필요	********************* ******** *************************** **********************************	승 인
	○ 잔디 및 식생매트 식재구간 식재면정리 반영 필요	********** **********************************
	○ 식생매트 식재구간 사면중 호안블럭 미철거 구간(호안 상단 1/2 정도)은 갈대 자연발생으로 식생매트 식재를 제외하고 식생매트 식재구간은 식재 간격 조정 필요	******************** ************** ************************************ ************************************
	○ 현장사무실 및 작업차량 임시진입로사용 녹지대 복원 필요	******************** **************** **************************** *********************************
	○ 원활한 수목 생육을 위한 빗물침투형 통기관 및 토양보습제 반영 필요	******************* ***** ********************************* ************************

[망원한강공원]

구 분	실정보고 내용	검토결과	비 고
식재공사	○ 현장사무소 사용 녹지대 복원 필요	****************** ********************************	승 인
	○ 사석부설 등 작업부지로로 사용된 녹지대(3개소) 복원 필요	******************** ***************** **************************** ************************* ********************************** *************************
	○ 초화류종자 살포 및 식생매트 식재구간 식재면정리 반영 필요	********** *************************

구 분	실정보고 내용	검토결과	비 고
식재공사	○ 영춘화, 마삭줄 등 현장여건에 따른 조정 필요	**************************** ****************************** *************************	승 인
	○ 교목 하부 지피류(줄사철, 헤데라) 식재 위치 변경 및 수량 조정 필요	******************************************** ******************************* *******************************
	○ 잔디식재 예정 띠녹지에 사철나무기 식재되어 있어 잔디 제외 필요	********** **********************************
	○ 원활한 수목 생육을 위한 빗물침투형 통기관 및 토양보습제 반영 필요	******************* ***** ********************************* ***********************

▢ 개략공사비

(단위 : 원)

구 분		공 사 비		증 감	비 고
		당 초	변 경
도 급 비	*****	***********	***********	***********
	****	***********	***********	***********
	*****	**********	**********	**********

○ 예산과목 : 한강공원이용 및 생태환경 개선, 한강 자연성 회복, 자연(형) 호안 복원, 시설비 및 부대비, 시설비

▢ 보고자 검토의견

○ ***********************************************************************************

붙임 : 1. 공사현장 실정보고 승인요청 공문 1부.

2. 공사현장 실정보고 검토보고서(서울시설공단) 1부.

3. 계략공사비 1부.  끝.