코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 준공기한 변경의뢰

1. 하천관리과-6709(2021.05.10.)호와 관련입니다.

2. 「빗물펌프장 시설용량증대 타당성조사 용역」에 대하여 아래와 같이 용역 준공기한 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다

가. 용역개요

1) 용역기간 : 2020. 05. 20. ~ 2021. 05. 14.

2) 용 역 사 : ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소 외 1개사

3) 용 역 비 : 486,690천원

나. 준공기한 연기 내용

구 분	용 역 기 간	용역비	비고
당 초	’20. 05. 20. ~ ’21. 05. 14.	486,690천원	용 역 비 변동없음
변 경	’20. 05. 20. ~ ’21. 07. 13.

다. 연기사유

○ 한남재정비촉진사업 관련, 방재계획(보광,동빙고 빗물펌프장 존치여부)에 대하여 관련부서 사업 추진중으로 본 용역 과업기간을 연장하여 방재성능확보 계획에 대응하고자 하며,

○ 이수∼과천간 복합터널계획을 고려한 방배 빗물펌프장의 방재성능확보 방안의 조정(유역변경 등 추가방안 검토)등 연계검토 필요성 제기 등

○ 본 용역 수행에 반영할 계획검토 및 협의기간이 필요

붙임 : 1. 방침서(용역 준공기한 연기 검토 보고) 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	하천관리과장
★주무관	박진화		치수설비팀장	박시현		하천관리과장	05/11 손경철
협조자
시행	하천관리과-6769	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문별관8층(하천관리과)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3878	/전송	02-2133-1044	/	parkjmhm@seoul.go.kr	/	부분공개(6)