문서번호	도시철도설비부-4722
결재일자	2021. 5. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설전기과장	도시철도설비부장
신용준		전계목	05/13 김중영
협조

『하남선(5호선연장) 1공구 정거장 전기공사』

설계변경 실정보고 검토보고(2회)

2021. 05.

도시철도설비부

『하남선(5호선연장) 1공구 정거장 전기공사 』

설계변경 실정보고 검토 보고(2회)

하남선(5호선 연장) 1공구 정거장 전기공사 설계변경 실정보고 건에 대하여 검토하고 그 결과를 보고 드림.

※ 관련근거 : 하남 제21-267호(2021.05.10.)호와 관련임

Ⅰ		공사 개요

□ 공 사 명 : 하남선(5호선연장) 1공구 정거장 전기공사

□ 공사규모 : L=1.1km, 정거장1개소, 입출고선 1.33km, 환기구 3개소

□ 공사기간 : 2018. 10. 01. ~ 2021. 09. 29.

□ 시 공 사 : (주)태원전력, ㈜씨티아이앤아이,㈜부민통신

□ 감 리 사 : 세종기술(주)

□ 계약금액 : 3,956,537천원

[단위 : 천원]

구 분	총 차	1차계약	2차계약	3차계약	4차계약
도 급 비	3,956,537	476,000	1,862,000	1,123,000	495,537
공사기간	2018.10.01. ~2021.09.29.	2018.10.01. ~2019.02.27.	2019.02.28. ~2019.11.30.	2019.12.01. ~2020.12.08.	2020.12.09. ~2021.09.29.

Ⅱ		실정 보고내용

□ 실정보고 사항

NO	건 명	관련근거	비고
1	E/S, E/V 동력 분전반 2차 배관,배선	설계 누락
2	대합실(연결통로) 제연커튼 전원공사	발주처 요구사항
3	다목적실 용도개선에 따른 전원공사	발주처 요구사항

□ 물량 증감 내용

NO	건 명	단위	수 량			비고
			당초	변경	증감
1	E/S, E/V 동력분전반 2차 배관,배선	개소	0	8	증 8
2	대합실(연걸통로) 제연커튼 전원공사	개소	0	3	증 3
3	다목적실 용도개선에 따른 전원공사	실	0	1	증 1	전등, 전열 공사

□ 공사비 증감

NO	건 명	금액	비고
1	E/S, E/V 동력분전반 2차 배관,배선	43,800,000
2	대합실(연걸통로) 제연커튼 전원공사	3,000,000
3	다목적실 용도개선에 따른 전원공사	3,100,000
합 계		49,900,000	(증)

[단위: 원]

□ 감리단 검토의견

◯ 금회 실정보고 사항은 설계누락 및 운영사 요구사항으로 향후 설계변경시 반영함이 적합하다고 사료 됨.

Ⅲ		조치의견

◯ 감리단의 검토의견에 따라 실정보고 승인코자 함.

Ⅳ		행정사항

◯ 실정보고 승인통보(본부 ⇒ 감리단)

따로붙임 : 하남선(5호선 연장) 1공구 감리단 실정보고 공문 1부.  끝.