코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(건축부장)
(경유)
제목	서울풍물시장 지붕막 교체 실시설계 결과에 대한 의견 회신

1. 도기본건축부-7930(2021.5.25.)호와 관련입니다.

2.「서울풍물시장 지붕막 교체 실시설계 결과」에 대한 의견을 아래와 같이 회신합니다.

가. 공사의 효율성을 기하기 위해 교수학습지원센터 방학기간인 7.31~8.8(9일간)과 풍물시장 하계 휴무기간인 8.2~8.5(4일간)에 난이도와 위험성이 높은 공정을 집중 실시하고, 막재 제작기간을 고려하여 7월 중순에 착공토록 일정 조정

나. 교수학습지원센터 수업 불편 최소화를 위하여 소음 및 분진 대책을 마련하고, 고중량  작업차량으로 인한 교수학습지원센터 부지 지반침하 및 정화조 손상을 방지하기 위하여 전문가 등이 현장 확인 후 시공계획서 작성

다. 서울풍물시장 주변은 유동인구가 많은 지역이므로 안전 예방조치 철저.  끝.

	서 울 특 별 시 장
★주무관	이대규		시장현대화팀장	이정연		소상공인정책담당관	05/28 강석
협조자
시행	소상공인정책담당관-7774	(		)	접수		(		)
우	04514	서울특별시 중구 서소문로 124 (서소문동) 씨티스퀘어 16층	/
전화	2133-5549	/전송	2133-0714	/	daekyu315@seoul.or.kr	/	대시민공개