아름다운 변화, 열린 구정, 행복도시 서대문
		서대문구
수신자		내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(북가좌2동노인복지센터 그린 리모델링 기본 및 실시설계 용역)

우리구에서 시행중인 『북가좌2동노인복지센터 그린 리모델링 기본 및 실시설계 용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경 하고자 합니다.

1. 용 역 명 : 북가좌2동노인복지센터 그린 리모델링 기본 및 실시설계 용역

2. 용역기간 : 2021. 4. 9. ~ 2021. 9. 5.

3. 업 체 명 : *******************

4. 용역내용

가. 공공건축물 그린 리모델링 지원사업 가이드라인에 포함된 필수공사 및 변행가능공사 적용 가능 여부 검토 및 반영

나. 노후 기계·전기·통신 등 모든 설비 교체 필요 여부 검토 후 설계에 반영

다. 건축물 외부 디자인 및 실내마감 인테리어 설계

라. 증축 필요 시 관계법령 검토 후 설계에 반영하며 이에 따른 인·허가 업무 수행 등

5. 설계변경 내용

가. 변경사유 : 2022년 서울시 제로에너지건물(ZEB) 전환 사업 지원 요청에 따른 에너지효율등급 1++ 이상의 인증을 받을 필요성 있어 에너지효율등급 예비인증 용역 과업 추가

※ 서울시 보조금 교부 조건 : 에너지효율등급 1++ 이상 인증 취득

나. 변경내용

1) 과업내용 : 기존 과업내용에 에너지효율등급 예비인증 1++ 이상 취득 내용 추가

2) 계약금액

구 분	당초	변경	비고
합 계	23,687,630원	31,387,630원	증7,700,000원
설계비	21,434,210원	21,434,210원
에너지효율등급 예비인증	-	7,000,000원	증7,000,000원
손해배상보험료	110,000원	110,000원
부가세	2,143,420원	2,843,420원	증700,000원

3) 용역기간

구 분	용역기간
당 초	2021. 4. 9. ~ 2021. 9. 5.
변 경	2021. 4. 9. ~ 2021. 11. 4.
변경사유	건축물에너지효율등급인증시스템 확인 결과 에너지효율등급 인증이 50일 이상 소요됨을 고려하여 기타 서류 제출 절차 등을 감안하여 60일 연장 결정

6. 예산과목 : 노인복지증진, 노인복지인프라 확충 및 지원, 노인여가복지시설 운영, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임  1. 설계변경 검토 보고 1부.

2. 설계변경 사유서 및 변경내역서 각 1부.

3. 계약내용변경신청 1부.

4. 합의각서 1부.

5. 예정공정표 1부.

6. 준공기한 연기 의뢰서 및 증빙자료 각 1부.  끝.

★주무관							방병준			어르신시설팀장					김선우					어르신복지과장					박우석						복지문화국장					07/05 강환복
협조자				주무관						허미선					주무관							박선옥					계약팀장								代정진희
재무과장							박춘식
시행			어르신복지과-13111									(						)		접수													(					)
우	03718					서울특별시 서대문구 연희로 248															/
전화		02-330-1271						/전송			02-330-1660					/	stonily@sdm.go.kr														/	부분공개(5)